	성동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	성동소방서 업무개시 일시 변경 및 공사 공정관리 철저 요청

1. 관련문서

가. 소방행정과-1502호( 2014.1.29.)“성동소방서 신축공사 건축 의뢰”

나. 소방행정과-14287호(2016.10.26.)“성동소방서 신축공사 공정 지연에 따른 업무협조”

다. 소방행정과-8082(2017.6.20.)“성동소방서 신축 준공기한 준수 및 공정관리 철저 협조 요청”

라.  소방행정과-124(2017.7.14.) “성동소방서 입주 및 업무개시관련 제반 행정처리 협조 요청”

2.  평소 도시 안전망 구축 및 소방행정업무에 기여하여 주신 귀 기관의 발전을 기원합니다.

3.“성동소방서 신축 공사”의 준공기한 경과에도 불구하고 건축공사 등 일부공정이 지연되어 기 통보한 업무개시 일시가 2017. 7. 17. 09:00 에서 2017. 7. 24.(월) 09:00 로 부득이 변경됨을 통보 드리며,

위와 관련하여 성동소방서 신축 공사가 조속한 기한내에 준공될 수 있도록 공종별 공정관리 철저 및 특단의 대책을 강구하여 성동구민과 약속한 소방행정 서비스 및 재난대응 출동업무가 정상적으로 시작될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

<< 업무개시 계획 변경 >>

가. 성동소방서 인사 발령 : 2017. 7. 17.(월)

나. 성동소방서 업무 개시 : 2017. 7. 17.(월) → 7. 24.(월)

다. 성동소방서 준공식 개최 : 2017. 8월 중. 끝.

	성동소방서장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
담당자	신종춘		장비회계팀장	강대문		소방행정과장	김영권		소방서장	07/18 김성회
협조자
시행	소방행정과-241	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 (행당동)	/
전화	(02)456-1812	/전송	(02)452-0080	/	jch321@seoul.go.kr	/	대시민공개