투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(안내판) 구매수량 변경 및 납품기한 연기 요청 -마포석유비축지지 주차장 공원화사업

1.  마포감(주차장공원화) 제2017-173(2017.07.13.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 『마포석유비축기지 주차장 공원화사업』에 소요되는 관급자재(안내판)에 대하여 수량 및 납품기한을 아래와 같이 변경하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 수량변경 요청내용

납품요구번호 (품의번호)	품명	규격	단위	수량			계약금액(원)			납품기한
				당초	변경	증감	당초	변경	증·감	당초	변경
121722430700 (147)	안내판	2340×1400	개	1	1	-	13,147,100	12,416,690	감 730,410	‘17.7.18	‘17.7.31
		830×170	개	3	3	-
		1400×700	개	1	1	-
		450×600	개	1	0	감 1

나. 변경사유 : 안내판 설치계획 변경(주출입구 계도표지판 삭제)

다. 연기사유 : 현장여건에 따른 시기 미도래

붙임  1. 조달물품매입요구서 각 1부.

2. 분할납품요구 및 통지서 1부.

3. 건설사업관리단 공문 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	김자환		공원시설과장	김인숙		방재시설부장	07/18 남궁용
협조자
시행	방재시설부-12495	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	3708-8683	/전송		/	2015060246@seoul.go.kr	/	대시민공개