문서번호	설비부-12283
결재일자	2017.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	07/18 권오식

준공기한 연기 검토 보고

- 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기/통신공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 07.

도시기반시설본부

[설 비 부]

준공기한 연기 검토 보고

[서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기/통신공사]

『서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기/통신공사』와 관련하여 ‘홍릉 바이오, 의료 R&D 앵커 조성공사 건설사업관리단’으로부터 제출된 준공기한 연기 요청에 대하여 검토하고 보고 드림.

1. 공사개요

○ 공 사 명: 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기/통신공사

○ 규    모: 지하1층, 지상 4층 리모델링공사

○ 공사기간: 2017.02.23.~2017.07.31.

○ 도급금액: 전기 금902,985,130원, 통신 금432,999,990원

○ 시 공 사: 전기-㈜대아티이씨 대표 김종용, 통신-(주)통광   대표 박응성

○ 감 리 사: ㈜한국종합건축사사무소 대표 전상백

2. 검토내용

○ 검토근거 : ㈜한국종합건축사사무소 한종홍릉 제 2017-176(2017.07.14.)호

- 전기/통신공사 준공기한 연장 요청 건

○ 보고내용

- 선행공종인 건축공사의 총차 준공기한이 2017년 8월 12일로 후속공종인 전기/통신공사 준공기한을 선행 공정인 건축공사 준공기한에 맞추어 2017년 8월 12일까지 연장.

4. 검토의견

○ 계약기간 조정

구 분	당 초	변 경	비 고
전기공사	2017.02.20.～2017.07.31.	2017.02.20.～2017.08.12.	증)12일
통신공사	2017.02.20.～2017.07.31.	2017.02.20.～2017.08.12.

※ 계약금액 변경 없음

○ 연기사유: 선행공종의 건축공사 총차 공정에 맞추어 후속공종인 전기/통신공사의 준공기한 연장이 필요함.

○ 연기사유 귀책소재: 도시기반시설본부

○ 지체상급 부과여부: 미부과

5. 처리의견

○ 건설사업관리단의 준공기한 연장의견이 적정하므로 선행공종인 건축공사 공정에 맞추어 후속 공종인 전기/통신공사 준공기한을 변경 계약하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 1. 준공기한 연기요청 공문 1부.

2. 시공사 준공기한 요청공문 각 1부.

3. 공사 예정공정표 전, 후. 각 1부.

4. 합의각서 각 1부. 끝.