투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기/통신공사 준공기한 연기의뢰

우리 본부에서 추진중인 『서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 전기/통신공사』준공기한을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 계약기간 조정

구 분	당 초	변 경	비 고
전기공사	2017.02.20.~2017.07.31.	2017.02.20.~2017.08.12.	증)12일
통신공사	2017.02.20.~2017.07.31.	2017.02.20.~2017.08.12.

2. 변경사유 : 선행 공종인 건축공사의 총차 준공기한에 맞추어 후속 공종인 전기/통신공사 준공기한 연장.

붙임  1. 준공기한 연기 검토서 1부.

2. 예정공정표 변경 전 후 각 1부.

3. 합의각서 각 1부. 끝.

	설비부장
주무관	유영선		시책사업과장	임현근		설비부장	07/18 권오식
협조자
시행	설비부-12327	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8650	/전송	02)3708-8659	/	ysy12290@seoul.go.kr	/	대시민공개