상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰 (2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

우리 사업소에서 시행중인 「2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(2차,최종) 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역
(장기계속단가계약)

2. 계 약 자 : **************

3. 용역기간 : 2016.07.25. ~ 2017.07.21.

4. 설계변경사유 : 시공 물량 증·감 등

5. 설계변경금액 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총 부기계약금액	227,645,900	242,468,600	증 14,822,700
2차 계약부기금액	227,645,900	242,468,600	증 14,822,700

6. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급․배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

붙  임 : 설계변경 내역서 및 관련 문서 각 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	박윤선		주무관	유광창		시설관리과장	07/19 代박종일
협조자
시행	시설관리과-19693	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소(행당동)	/
전화	02-3146-2798	/전송	02-3146-1821	/		/	부분공개(5)