상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	동부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행 (2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

우리 사업소에서 시행중인 「2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역(장기계속단가계약)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역
(장기계속단가계약)

2. 계 약 자 : **************

3. 공사기간 : 2016.07.25. ~ 2017.07.21.

4. 설계변경사유 : 시공 물량 증·감 등

5. 설계변경금액 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
총 부기계약금액	256,720,000	271,542,700	증 14,822,700
1차 계약부기금액	29,074,100	29,074,100	-
2차 계약부기금액	227,645,900	242,468,600	증 14,822,700

6. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 급․배수공사비, 신설공사비

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지비

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비

붙  임 : 1. 설계변경 심의위원회 개최 결과 보고서 1부.

2. 설게변경 심의 의뢰서 1부.

3. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

4. 계약금액조정 검토결과서 1부.

5. 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	박윤선		주무관	유광창		시설관리과장	代박종일		동부수도사업소장	07/19 이구석
협조자
시행	시설관리과-19672	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소(행당동)	/
전화	02-3146-2798	/전송	02-3146-1821	/		/	부분공개(5,7)