문서번호	시설관리과-19624
결재일자	2017.7.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박윤선		유광창	07/19 최명익
협조

설계변경(2차,최종) 심의 위원회 개최 결과보고

[2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역]

2017. 7.

동부수도사업소

(시설관리과)

설계변경(2차, 최종) 심의 위원회 개최 결과보고

2016년 중랑,동대문구 관내 상수도 공사 건설폐기물 처리용역

우리 사업소에서 시행중인『2016년 중랑,동대문구 관내 상수도 공사 건설폐기물 처리용역에 대한 설계변경(2차,최종) 사전 심의위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1				용역현황

○ 용 역 명 : 2016년 중랑,동대문구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역
(장기계속단가계약)

○ 용역개요 : 건설폐기물 운반 5,775㎥, 건설폐기물 처리 11,247톤

○ 계 약 자 : **************

○ 용역기간 : 2016.07.25. ~ 2017.07.21.

○ 물량증감 내역 : 폐기물 운반 및 폐기물처리 7개공종

- 당초 : 폐기물운반(폐아스콘 1,198㎥, 폐콘크리트 1,087㎥, 폐토석 3,490㎥)

폐기물처리(폐아스콘 1,407톤, 폐아스콘(무대) 1,407톤,
폐콘크리트2,500톤, 폐토석5,933톤)

- 변경 : 폐기물운반(폐아스콘 1,505㎥, 폐콘크리트 1,004㎥, 폐토석 2,917㎥)

폐기물처리(폐아스콘 3,535톤, 폐콘크리트 2,304톤, 폐토석 4,957톤)

○ 계약금액 변경내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감	비 고
총용역비	256,720,000	271,542,700	14,822,700
용역가액	233,381,818	246,857,000	13,475,182
부 가 세	23,338,182	24,685,700	1,347,518

2				심의 위원회 개최사항

○ 개최일자 : 2017. 7. 19.(수) 10:00

○ 개최장소 : 3층 회의실

○ 참석위원 : 시설관리과장 외 5명

○ 심의내용 : 건설폐기물처리 및 운반 물량 증·감 등에 따른 설계내역
변경 적정성 검토

○ 심의결과 : 위 심의내용에 대하여 적정하다는 의견을 제시함

3				향후계획

○ 위와 같이 설계변경 심의 위원회 개최 결과 심의위원 모두 적정하다는 의견을 제시한 바, 이를 설계변경 내역에 반영하여 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 1. 설계변경 심의 의뢰서 1부.

2. 설계변경 사전심의 의결서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.