문서번호	공원녹지정책과-12770
결재일자	2017.7.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
실무사무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장		푸른도시국장
박수미	이용남	유영봉		07/20 최윤종
협 조

어린이대공원

동화공원 조성사업 투자심사 의뢰계획

2017. 7.

푸 른 도 시 국

(공원녹지정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

어린이대공원

동화공원 조성사업 투자심사 의뢰계획

’16.12.7. 푸른도시국으로 업무이관된 어린이대공원 동화공원 조성사업 추진을 위해 아래와 같이 투자사업 심사분석을 의뢰하고자 함

□ 추진근거(문화본부 디자인정책과 추진, ’16. 12. 7. 푸른도시국으로 업무이관)

○ 인어공주동상 유치 및 동화공원 조성계획 수립(시장방침 제305호, ’14.11.12.)

○ 동화테마공원『동화의 숲』조성 기본계획(행정1부시장방침 제293호, ’16.10.10.)

□ 추진목적

○ 어린이와 부모가 함께 동화를 체험하고 즐기는 과정에서 어린이에게는 창의력과 정서적 고양을, 부모에게는 동심을 되찾는 기회를 제공하여 도심에서 가족과 함께 자연을 즐기며 화합할 수 있는 공간 제공

○ 세계인이 공감하는 국내외 동화 콘텐츠를 활용하여 상상력과 감동을 주는 문화체험활동 거점 공간 조성

□ 추진경위

○ 2014.08.12. : 서울시-오덴세시 간 교류협력 MOU체결

○ 2014.11.12.  :「인어공주동상 유치 및 동화공원 조성계획」수립

○ 2015.06.11.  :「(가칭) 동화공원 조성을 위한 용역 추진계획」수립

○ 2015.10.19.  : 기본계획 용역 착수(2016.07.31. 용역 준공)

○ 2016.07.15.  : 동화공원 조성사업 타당성 분석에 대한 검증 착수

○ 2016.09.06.  : 서울공공투자관리센터 검토 결과 : 경제적 타당성 있음

○ 2016.10.25.  :투자심사 결과 ‘재검토’

- 공원 전체 운영계획과 연계하여 추진이 필요하고, 어린이대공원 주관부서인 푸른도시국과 협의를 거쳐 추진

- 공원조성계획(입장료 및 프로그램 등) 변경 후 추진

- 입장료 유료화에 대한 신중한 검토 필요

- 공원 본래의 컨셉과 관련한 시설계획 등에 대한 종합적인 검토 필요

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 어린이대공원 동화공원 조성사업

○ 위    치 : 어린이대공원(능동근린공원) 내

○ 규    모 : 42,000㎡(연못 6,000㎡ 포함)

○ 사업내용 : 9개 테마존으로 구성된 동화공원 조성

- *********************************************************************************************

○ 사업기간  :  2018 ~ 2020년

○ 사 업 비  :  ******************************************

********************************************************************************************************************************************************************************

□ 투자심사 의뢰사유 및 검토의견

○ 동화를 중심으로 한 테마공원 조성으로 어린이들에게 상상력과 영감을 제공하고 참여활동 중심의 콘텐츠를 통해 어린이의 상상력과 창의력을 키우고 정서적 안정을 돕는 데에도 크게 기여할 것으로 기대됨

○ 어린이대공원내 기존 시설과 공간을 재배치를 통해 사업비 투자를 최소화하고 어린이대공원의 기존 시설물 및 공원조성계획과 연계하여 통합적 조성을 통해 공원의 정체성을 확고히 하는 계기가 될 것임

□ 향후계획(기투자심사 결과 보완방안)

○ 공원관리 주관부서인 푸른도시국에서 투자심사 의뢰 등 업무추진

○ 공원설계시 어린이대공원 전체 공원컨셉과 연계하여 종합적인 검토를 통해 공원조성계획을 수립하여 도시공원위원회 심의 절차 등 이행

○ 유료화 등 운영계획과 관련된 사항은 설계 등 향후 추진과정에서 검토

첨부  투자심사의뢰서 1부.  끝.