상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	구의 재건설공사 하자보수에 따른 업무 협조 요청

1. 구의 정수시설과-1821('17.06.07)호와 관련입니다.

2. 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자보수 관련 아래와 같이 구의 제2정수장 생산중단 예정인바,

○ 하자보수 기간 : 2017. 08. 01. ~ 10. 15.(약 75일)

○ 생산중단 기간 : 2017. 08. 01. ~ 09. 15.(약 45일)

3. 관련 부서 및 정수센터에 아래와 같이 업무 협조 요청하오니 깨끗한 아리수를 안정적으로 생산할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 부서별 협조 내용

관련 부서	협조 내용
시설과 뚝도정수센터	구의 하자보수 공사 전 뚝도 생산시설 70만톤/일이 정상적으로 가동 될 수 있도록 시설 준공 및 운영 철저
배수과	암사 생산부담을 줄일 수 있도록 1단계 ③구간 대체급수 환원을 7월말까지 완료하고, 당초 예정된 뚝도 준공 후 1단계 ⑤구간부터 대체급수 환원은 구의 제2정수장 생산 가능 시까지 연기 ▶1단계 ③구간 : 한강대교, 반포대교 대체급수 전환(암사 ⇒ 대현산, 5만톤/일) ▶1단계 ⑤구간 : 월계배수지 대체급수 전환(강북 ⇒ 구의, 15만톤/일)
암사정수센터	구의2정수장 생산중단 기간 동안 구의 아차산배수지로 증산 보충 (4만톤/일 ⇒ 8만톤/일)
구의정수센터	하자보수 공정 관리 철저로 생산중단 기간 최소화

※ 관련 정수센터에서는 구의 하자보수기간 동안 단수가 수반되는 공사는 가급적 자제

붙임 : 1. 구의정수센터 관련 공문 및 첨부서류 각1부.

2. 대체급수 환원조치 계획(배수과) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	배수과장,시설과장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장
주무관	권창범		생산관리과장	한희선		생산부장	07/20 유성종
협조자
시행	생산관리과-9098	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울시상수도사업본부 생산부 생산관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	31461318	/전송	02-3146-1319	/	kcb0810@seoul.go.kr	/	부분공개(2)