문서번호	문화융합경제과-4192
결재일자	2017.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		문화산업정책팀장		문화융합경제과장
김성미		박주선		07/20 김경탁
협 조

2017년 봉제역사관 개관준비 사업계획(제1차)

2017.  7

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 봉제역사관 개관준비 사업계획(제1차)

봉제역사관 위탁사업비 계약심사 결과를 반영하여 사업계획 수립하고, 봉제역사관 개관준비에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 추진경위

❍ 봉제역사관 위탁운영기관 우선협상대상자 선정 : ’17.3.15

❍ 수탁운영기관 협약체결 : ’17.5.10

❍ 2017년 사업계획서 제출(수탁기관) : ’17.6.9

❍ 민간위탁 계약심사 결과 통보(계약심사과) : ’17.7.11

□ 시설개요

❍ 위    치 : 종로구 창신동 647-50,6 (동대문역 도보8분 거리)

❍ 규    모 : 대지면적(266.8㎡), 연면적(499.12㎡), 지하1층・지상4층

❍ 공간구성 : 전시 공간, 디지털아카이빙 공간, 코워킹 공간(팹랩), 교육 및 체험, 시민소통 공간, 카페, 다목적 공간, 사무공간 등

(조감도)		(단면도)

□ 민간위탁 현황

❍ 위탁기간 : 2017. 5. 10 ~ 2020. 5. 9(3년간)

❍ 사업예산(2017년) : 495백만원 ※ 제1차 259백만원 배정

제1차 사업계획에서 제외된 전시연출 및 아카이빙자료 구축관련 사업비는 브랜딩 전략 용역 추진결과 및 아카이빙자료 목록화 결과 반영하여 추가 배정

❍ 수탁업체 및 참여인력 현황(2017년) : 총 2명

소 속	성 명	봉제역사관직 위	담 당 업무
㈜공공공간	홍성재	디 렉 터	∘봉제역사관 아이덴티티 정립 및 공간디자인 ∘운영 프로그램 개발, 기획 ∘평가지표, 평가 계획 수립 ∘공간 운영 계획 수립 및 인력 채용 규정(주) ∘홍보 마케팅(주)
(사)한국패션봉제아카데미	신종화	부디렉터	∘아카이브 자료 구축 및 디지털 작업화 ∘장비, 비품 목록화 ∘주민친화 프로그램 ∘공간 운영 계획 수립 및 인력 채용 규정(부) ∘홍보 마케팅(부)

□ 2017년 주요업무 : 봉제역사관 개관준비

❍ 봉제역사관 아이덴티티 정립을 통한 프로그램 컨셉 기획 및 공간디자인

❍ 운영 프로그램 개발, 기획

❍ 아카이브자료실 구축 자료 조사, 수집 및 디지털(영상)작업화

❍ 팹랩실 구비(임차)장비 조사(목록, 구입처, 비용 등)

❍ 사무공간 조성 장비 및 비품 조사(목록, 구입처, 비용 등)

❍ 공간 운영계획 수립 및 시설대여 등 관리 매뉴얼 작성

❍ 인력채용 및 시설운영 규정(공간 대여료 기준 등) 마련

❍ 개관 전 주민친화 프로그램 운영 및 홍보 마케팅

❍ 평가지표 마련 및 평가계획 수립

❍ 봉제역사관 개관준비 위원회 참여 및 의견 반영 추진

Ⅱ		세부사업계획

1. 봉제역사관 브랜딩 전략 수립 및 전시․프로그램 기획

□ 목    적

○ 봉제역사관 정체성 확립을 통한 이미지 브래딩 및 공간브랜딩 전략 수립

○ 봉제의 의미와 산업적 가치 재발견을 위한 연계성있는 전시․프로그램 기획

○ 지역주민에게 친화적이고, 외부방문객에게 매력적인 킬러 콘텐츠 마련

□ 사업내용

○ 봉제역사관의 정체성 정의 및 컨텐츠 개발

- 봉제역사관이 왜 필요하고, 무엇을 제공할 것인지에 대한 정의를 통해

- 봉제역사관의 정체성 및 타겟 정의에 따른 컨텐츠 기획

- 지속가능성을 고려한 상설 및 기획 전시/프로그램 기획

○ 봉제역사관 360〫  컨셉 디자인

- BI, 스토리텔링, 컨텐츠, 프로그램의 시각화에 이르기까지 일관된 연계성을 완성하는 360〫  컨셉 디자인

- 컨텐츠와 프로그램에 따른 공간구성 및 시각화 컨셉 디자인

○ 봉제역사관 컨텐츠 디자인 및 공간디자인

- 봉제역사관 컨첸츠 디자인(예시, 지역 봉제공장 브랜딩 및 생산 제품 상품화)

- 컨텐츠에 따른 공간디자인  ※ 실시설계 이전 단계의 디자인 도면 완성

○ 실시설계 및 시공 감리

□ 추진방법 : 스토리텔링 전문기관 용역 수행

□ 소요예산 : 88,000천원(부가가치세 포함)

□ 추진일정 : 2017. 7 ~ 12월

과업	7월	8월	9월	10월	11월	12월
컨텐츠 기획 및 공간디자인	정체성 정의 및 콘텐츠 기획	컨셉디자인 및 공간구성	컨텐츠 디자인 및 컨텐츠에 따른 공간 디자인	실시 설계 및 내부 인테리어 공사 감리

※ 단계별 보고회 및 결과물 제출

2. 전시 연출 및 운영프로그램 구체화

□ 사업내용

○ 봉제역사관 정체성 및 브랜딩 전략을 반영한  전시․운영 프로그램 구체화

※ 봉제역사관 브랜딩 전략 수립 및 전시․프로그램 기획 결과에 따라 작업 수행

□ 소요예산 : 브랜딩 전략 결과에 따른 전시프로그램 등 예산 별도배정

□ 추진일정 : 2017. 8 ~ 12월

과업	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
전시 및 운영프로그램 기획설계			전시 및 운영 프로그램 구체회(1단계)		전시 및 운영 프로그램 콘텐츠 구체화(2단계)		전시 및 운영 프로그램 개발 완료

3. 아카이브 자료 구축 및 디지털 작업화

□ 목    적

○ 봉제 역사, 봉제 산업관련 국내 최고 아카이브 구축을 통한 봉제역사관 정체성 구현

○ 구축 아카이빙 자료의 봉제역사관 홍보 및 전시콘텐츠 활용

○ 디지털 봉제문화유산의 생산과 방문객의 체험형 서비스 개발

□ 사업내용

○ 아카이브 대상 자료 조사(수집목표, 목록화)

- 봉제 역사․산업을 ‘과거-현재-미래’, ‘사람-사건-사물’ 등을 테마로 아카이브 대상 자료 조사

- 디지털 영상작업화 대상 조사 및 발굴

- 디지털 전시자료 콘텐츠 개발

○ 보존가치 평가와 아카이빙 대상 자료 확정(수집범위)

- 봉제분야의 실물자료 확보 기준 수집(아카이빙위원회 구성)

근대-산업화 노동사 전문가: 봉제문화, 주요 사건 상징성 감수

봉제산업사 전문가: 봉제산업 변천사 감수

봉제인(60대이상, 40년 이상 경력): 장비-에피소드 감수

(유사산업)역사박물관 학예사: 사료/유품 관리방법론 지도

- 소장자료 관리규정 제정, 국제박물관위원회 윤리규정 내재화

- 사료-유품별 아카이빙 대상여부 검토의견서(아카이이빙 위원회) 작성

○ 아카이브 대상 자료 수집(수집전략)

- 사료, 유품 기증 사업추진단 운영, 활동

- 봉제관련 사료 기증 운동 캠페인 추진

- 수집 / 주요 기관을 대상으로 자료 수집 요청 제안

- 구매․임차차 / 중요 자료 수집을 위한 구매․임차차 목록 작성

- 봉제역사 관련자료 전시·소장기관과 자료 DB 등 협력체계 구축

- 임시 수장고 확보·운영

○ 디지털 영상자료 제작

※ 디지털 영상작업화 대상 확정 후 제작 추진

□ 소요예산(디지털 영상 작업화) : 아카이빙 대상 확정 후 예산배정

□ 추진일정 : 2017. 6 ~ 12월

과업		6월	7월	8월	9월		10월	11월	12월
아카이브 자료 자축 및 디지털 작업화	자료 조사	- 자료 조사 및 목록화 (도서, 논문, 보고서 등) 조사 자료 보존가치 검증		- 자료 조사 및 목록화 (기계, 소품 등) 조사 자료 보존가치 검증			- 자료 조사 및 목록화 (사진, 포스터, 영상자료 등) 조사 자료 보존가치 검증		DB 구축 (전산화 및 책자 발간)
	자료 수집	- 추진단계에 따른 자료수집 계획 수립 기증 등 필요 절차 수행		- 추진단계에 따른 자료수집 계획 수립 기증 등 필요 절차 수행			- 추진단계에 따른 자료수집 계획 수립 기증 등 필요 절차 수행
	영상자료제작		영상 제작 대상 조사 및 계획수립			영상자료 제작

4. 개관 전 주민친화 프로그램 운영(공모사업)

□ 목    적

○ 지역 주민, 청소년, 봉제인 등의 주도적 기획 및 참여를 통해 지역과 봉제, 봉제역사관에 대한 관심도 제고 및 주민 역량 강화

□ 사업내용

○ 지역 주민(청소년)․봉제인 대상 간담회, 워크숍 개최

- 지역단체와 봉제역사관 중복 프로그램(참여, 체험 등) 조정 및 운영활성화 등을 위한 창신숭인 주민, 봉제인, 이해관계자 간담회 및 워크숍 개최

□ 간담회/워크숍 : 월 1회(총 6회, ’17. 7 ~ 12월), 회당 20~50명 참여

- 소요예산 : 5,314천원(강사비, 재료비 등 진행비)

○ 지역 주민 주도적 참여를 위한 공모사업 추진

- 공모를 통해 지역 주민의 주도적 기획, 참여 사업 발굴․운영

- 공모주제 : 봉제역사관 및 봉제 홍보 방안

- 대    상 : 지역 주민, 공동체, 학교 등(창신숭인 소재)

- 소요예산 : 20,000천원(4팀 선발)

※ 창신숭인도시재생지원센터 등과 유기적 협력관계 유지

○ 봉제역사관 도슨트 양성 사업

- 목    적 : 지역의 역사와 문화, 봉제산업의 과거-현재-미래를 소개하는 봉제역사관 해설사 양성․운영

- 대     상 : 봉제역사관 해설사 희망하는 창신숭인 지역주민(10명)

- 내     용 : 지역 역사, 문화, 관광자원 및 봉제산업 관련 교육과정 운영

※ 양성과정 신청자에 따른 교육내용 조정 운영

□ 과정 수료 시, 발표회 개최

- 소요예산 : 5,327천원(강사, 교재비 등)

□ 소요예산 : 30,641천원

□ 추진일정 : 2017. 7 ~ 12월

과 업	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
간담회		간담회	간담회	간담회	간담회	간담회	간담회
워크숍				워크숍			워크숍
공모사업			사업공고	선정사업 추진
도슨트 양성사업			사업공고	양성과정 운영			발표회 개최

5. 개관 전 홍보 추진계획

□ 목    적

○ 봉제역사관의 정체성과 비전을 알리고, 조기 활성화를 위해 체계적이고 전문적인 홍보활동 추진

□ 사업내용

○ 봉제역사관 홍보 컨텐츠 컨설팅(기획) 및 계획수립

○ 홈페이지(웹/모바일) 제작․관리운영

○ 홍보 컨텐츠 디자인, 제작

- 현수막, 안내책자, 초대장 등 발간

- SNS 온라인 콘텐츠 제작(10회분)

- 홍보 사진 촬영 및 영상 제작(1회, 5분 이내)

○ 홈페이지(웹/모바일) 제작․관리운영

○ 홍보에 대한 피드백 관리계획 수립

□ 배포방법

○ 포스터, 브로슈어 등 홍보물 배포

○ S.N.S, 주요 언론사, 유력 미디어 활용 등 온/오프라인 채널을 통한 공격적인 홍보 진행

□ 소요예산 : 59,388천원

□ 추진일정 : 2017. 7 ~ 12월

과 업	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
홍보 (기획,제작,배포)		홍보 (컨설팅,기획)		홍보 디자인 콘텐츠 제작, 배포 (온오프라인, 언론사, 방송사 등)
홈페이지제작관리			홈페이지제작․관리

6. 평가지표 마련 및 평가계획 수립

□ 목    적

○ 성공적 지속관리를 위한 평가지표 개발– 평가 - 환류체계 마련

○ 지역주민 등 방문객, 패션봉제산업 관계자 및 관련 전문가와 운영 성과 공유하고 제안사항에 대해 개선 반영할 수 있는 선순환 시스템 구축

□ 사업내용 : 정성적, 정량적 평가 지표 개발 및 평가계획 수립

□ 추진방법 : 평가지표 개발 전문기관에 의한 용역 수행

□ 소요예산 : 10,000천원

□ 추진일정 : 2017. 8 ~ 12월

과 업	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
평가지표개발 및 계획 수립			평가지표 개발 용역 추진			평가계획 수립

7. 공간 조성 및 운영 계획 수립

□ 목    적

○ 최적의 공간활용 방안 및 운영 매뉴얼 마련을 통해 체계적이고 효율적인 공간운영 도모

□ 사업내용

○ 팹랩실 조성․운영계획 수립

- 전문가 자문 및 운영사례 검토를 통해 팹랩실 활용 방안 기획

- 팹랩실에 필요한 장비 임차 목록화 (기기명, 구입처, 목록, 비용산출 등)

○ 카페 조성․운영계획 수립

- 운영 사례(예, 성수동 일자리센터) 검토를 통해 카페운영 계획 수립

- 구매와 임차에 각기 필요한 목록 조사 (목록, 구입처, 비용 등)

○ 기념품샵 조성․운영계획 수립

- 운영 사례(예, 성수동 일자리센터) 검토를 통해 기념품샵 운영 계획 수립

- 필요 장비 등 목록 조사 (목록, 구입처, 비용 등)

○ 사무공간 조성

- 사무공간 조성에 필요한 장비 및 비품 조사

- 구매와 임차에 각기 필요한 목록 조사 (목록, 구입처, 비용)

※ G2B 시스템 활용

○ 시설운영 규정 마련 및 매뉴얼 작성(개관후 비치)

- 팹랩실, 카페, 기념품샵 등 시설 운영 매뉴얼 작성

- 이용자별 시설 사용(대여) 근거 및 이용료 가이드

- 인력채용 목록화 / 인력별 역할 분담표 작성

- 직원 인사-업무-근태 규정 작성

- 역사관 안전조치 매뉴얼 작성

- 보안점검 및 조치 지침 작성

□ 소요예산 : 비예산

□ 추진일정 : 2017. 6 ~ 12월

과 업	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
펩랩실 조성	공간컨설팅 수행 및 전문가 자문		구비장비 목록화	운영계획 수립	설계 및 내부인테리어 공사
카페 조성	공간운영 전문가, 주민협의체 등		구비장비 목록화	운영계획 수립	설계 및 내부인테리어 공사
기념품샵 조성	공간컨설팅 수행 및 전문가 자문		구비장비 목록화	운영계획 수립	설계 및 내부인테리어 공사
사무공간 조성			구비장비 목록화		설계 및 내부인테리어 공사
시설운영 규정, 매뉴얼 작성				운영 규정 및 매뉴얼 작성

Ⅲ		추진일정 및 사업비(1차) 내역

□ 추진일정

과업		5월	6월		7월	8월	9월		10월		11월		12월
사업계획서 (예산) 수립		2017년 사업계획제출	2017년 사업계획 보완		2017년 사업계획 확정	2018년 사업계획 및 예산안 제출	2018년 사업계획 등 보완						2018년 사업계획 확정
컨텐츠 기획 및 공간디자인					정체성 정의 및 콘텐츠 기획	컨셉디자인 및 공간구성	공간 디자인		실시 설계 및 내부 인테리어 공사 감리
전시 및 운영프로그램 기획설계						전시 및 운영 프로그램 구체회(1단계)			전시 및 운영 프로그램 콘텐츠 구체화(2단계)				전시 및 운영 프로그램 개발 완료
아카이브 자료 구축 조사, 수집 및 디지털 작업화	자료 조사		- 자료 조사 및 목록화 (도서, 논문, 보고서 등) 조사 자료 보존가치 검증			- 자료 조사 및 목록화 (기계, 소품 등) 조사 자료 보존가치 검증			- 자료 조사 및 목록화 (사진, 포스터, 영상자료 등) 조사 자료 보존가치 검증				DB 구축 (전산화 및 책자 발간)
	자료 수집		- 추진단계에 따른 자료수집 계획 수립 기증 등 필요 절차 수행			- 추진단계에 따른 자료수집 계획 수립 기증 등 필요 절차 수행			- 추진단계에 따른 자료수집 계획 수립 기증 등 필요 절차 수행
	영상자료제작				영상 제작 대상 조사 및 계획수립			영상자료 제작
개관 전 주민 친화 프로 그램 개발 운영	간담회 (워크숍)				간담회	간담회		간담회 (워크숍)	간담회		간담회		간담회 (워크숍)
	주민 공모					사업공고		선정사업 추진
	도슨트양성					사업공고		양성과정 운영				결과 발표
개관 전 홍보					홍보 컨설팅, 기획	홍보 디자인 콘텐츠 제작, 배포 (온오프라인, 언론사, 방송사 등)
홈페이지 제작, 관리						홈페이지 제작, 관리
평가지표 마련						평가지표 개발					평가계힉 수립
공간조성 운영계획	팹랩실 조성 및 운영계획		공간컨설팅 수행 및 전문가 자문			구비장비 목록화	운영계획 수립		설계 및 내부 인테리어 공사
	카페 조성		공간운영 전문가, 주민협의체 등 자문			구비장비 목록화	운영계획 수립		설계 및 내부 인테리어 공사
	기념품샵 조성		공간컨설팅 수행 및 전문가 자문			구비장비 목록화	운영계획 수립		설계 및 내부 인테리어 공사
	사무공간 조성					구비장비 목록화			설계 및 내부 인테리어 공사
시설 운영규정, 매뉴얼 작성							운영규정 및 매뉴얼 작성

□ 사업비(1차) 내역

(단위 : 천원)

구 분	사 업 내 용		금 액
예 산 총 액			495,000
1차 배정사업비(A+B)			259,307
사업소계(A)			188,029
봉제역사관 브랜딩 전략 수립 및 전시 기획	∘정체성 정의 컨텐츠 개발 ∘봉제역사관 360〫 컨셉디자인 ∘컨텐츠 디자인 및 공간디자인	1식 x 88,000천원	88,000
전시연출 및 운영프로그램 구체화	∘전시 ·운영 프로그램 구체화		미확정
아카이브 자료 구축 및 디지털 작업화	∘영상자료 제작 등		미확정
지역주민(청소년)․ 봉제인 대상 간담회, 워크숍 개최	∘간담회 월1회 x 40만원(20명 기준) x 총6회		2,400
	∘워크샵 총 2회 x 1,457천원		2,914
지역주민 주도참여 공모사업 추진	∘주민주도프로그램 발굴 공모사업 4팀 x 5,000천원		20,000
봉제역사관 도슨트 양성 사업	∘진행1(강연·장소임차·참고자료등)10회 x 400천원		4,000
	∘진행2(워크샵, 입학, 수료식) 3회		1,327
홍보 컨텐츠 컨설팅	∘홍보컨설팅 기획 1식 x 10회 x 1,000천원		9,000
홈페이지 제작,관리	∘홈페이지 제작 1식 x 27,258천원		27,258
	∘홈페이지 관리 연간 5,000천원		5,000
홍보 컨텐츠 디자인 및 제작	∘디자인(현수막·초대장) 1식 x 5,000처원		5,630
	∘안내책자 인쇄
	∘온라인 컨텐츠 제작 1식 x 10회 x 1,000천원		10,000
	∘홍보사진 촬영 5회 x 300천원		1,500
	∘홍보영상 제작 1식 x 1,000천원		1,000
평가지표 개발 컨설팅	∘평가지표 개발 컨설팅 1식 x 10,000천원		10,000
인건비, 운영비 소계(B)			71,278
인건비	∘인건비 -디렉터 8개월 x 3,500천원 -부디렉터 8개월 x 3,200천원		53,600
	∘퇴직금 8개월 x 6,700천원 / 12개월		4,467
	∘공적보험료(기관부담 4대보험 8개월)		5,049
운영비	∘전문가 개관준비위원회 진행비 7명 x 9회 x 100천원		6,300
	∘회의진행 사무용품 / 화재보험, 손해보험		1,862

Ⅳ		행후계획

○ 계약심사 결과 통지 및 3/4분기 사업비 신청 안내(수탁기관)

○ 월별 추진결과 점검 보고회 개최(’17.7.28일 제1회 보고회 예정)

○ 브랜딩전략 용역 및 아카이빙 구축 자료 목록화 결과 반영하여 ‘전시연출’,‘영상․디지털 작업’ 사업계획(2차) 수립 및 예산배정

붙임 : ‘이음피움 봉제역사관 운영’ 민간위탁 계약심사 결과 통보서 1식.  끝.