부 장	07/20 代김형건		과 장	김종상	심사자	임병길	설계자	원길묵		설 계	심 사		결 재
										2017년 7월 일	2017년 7월 일
변 경 설 계 서(총괄 2회)
용 역 명 : 신림선 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역 2공구(총괄 2회)
구 분					당 초				변 경			증.감		비 고
총 용 역 비					3,124,636,000				3,141,829,000			증) 17,193,000		물가변동 반영 및 감리원 투입계획 변경
도급비		공 급 가 액			2,800,941,818				2,800,941,818			-
		물 가 변 동			5,300,000				20,930,000			증) 15,630,000
		소 계			2,806,241,818				2,821,871,818			증) 15,630,000
		부 가 가 치 세			280,624,182				282,187,182			증) 1,563,000
		손 해 배 상 공 제 료			37,770,000				37,770,000			-
		계			3,124,636,000				3,141,829,000			증) 17,193,000
< 용역개요 > ○ 총연장 : 1,142m (정거장 1개소, 본선환기구 1개소, 차량기지 1개소) ○ 감리기간 : 당초) 2011. 11. 01 ~ 2021. 09. 07 변경) 2011. 11. 01 ~ 2022. 03. 07