부 장	07/20 代김형건		과 장	김종상	심사자	임병길	설계자	원길묵		설 계	심 사		결 재
										2017년 7월 일	2017년 7월 일
변 경 설 계 서(1차 3회)
용 역 명 : 신림선 경전철 민간투자사업 전면책임감리용역 2공구(1차 3회)
구 분					당 초				변 경			증.감		비 고
총 용 역 비					335,379,000				335,379,000			-		물가변동 반영 및 감리원 투입계획 변경
도급비		공 급 가 액			296,811,452				281,181,452			감) 15,630,000
		물 가 변 동			5,300,000				20,930,000			증) 15,630,000
		소 계			301,817,272				301,817,272			-
		부 가 가 치 세			30,181,728				30,181,728			-
		손 해 배 상 공 제 료			3,380,000				3,380,000			-
		계			335,379,000				335,379,000			-
< 용역개요 > ○ 총연장 : 1,142m (정거장 1개소, 본선환기구 1개소, 차량기지 1개소) ○ 감리기간 : 당초) 2011. 11. 01 ~ 2017. 07. 20 변경) 2011. 11. 01 ~ 2017. 07. 28