문서번호	시설보수과-6234
결재일자	2017.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		07/20 박병연
협 조
	주무관			김규춘
	주무관			조정갑

충격흡수시설 구매 및 설치 계획

2017. 7.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

충격흡수시설 구매 및 설치 계획

2016년도 사업으로 시행한『충격흡수시설 구매 및 설치』와 관련하여 미설치된 충격흡수시설(2개소)에 대한 구매 및 설치계획.

※ 관련근거 : 충격흡수시설 노후 및 파손에 따른 조치계획 보고『시설보수과 9651(2016.11.16.)』

Ⅰ		추진현황

❍ 2016.11.16 : 노후 및 파손된 충격흡수시설 설치방침(구매 및 설치)

❍ 2016.12.12 : 충격흡수시설 구매 및 설치 실정보고(설치장소 변경 및 신규설치)

- 설치수량 : 총 7개소(기존 6개소, 신규 1개소)

❍ 2016.12.15 : 충격흡수시설 5개소 설치

❍ 2017. 7.13 : 2016년 미설치 충격흡수시설 현장 재조사

❍ 2017. 7.28 : 시공사 계약 및 시공(예정)

Ⅱ		주요 보고내용

□ 2016년도 충격흡수시설 설치대상 7개소 중 2개소 미설치

❍ 미설치 사유

연번	위치	설치불가 사유	현황사진
1	구로역지하차도 (안양천방향)	설치예정 위치(포장부)에서 상수도 이정표(맨홀) 저촉으로 설치 불가 (※ 기존 제품으로는 설치 가능)
2	구로지하차도 (영등포방향)	2016년 충격흡수시설 설치시 본 규격의 제품이 없어 설치 못함

Ⅲ		검토결과

□ 파손 충격흡수시설 2개소에 대하여 본 위치에 설치가 가능하고 부분 정비로 보수비가 저렴한 기존 회사 제품으로 재설치하여 도로시설물의 안전관리 및 운전자 등 인명보호에 만전을 기하고자 함

□ 충격흡수시설 설치 개요

❍ 정비개소 : 2개소

❍ 정비위치 : 구로역지하차도, 구로지하차도

❍ 시 공 사 : ㈜그린우전  대표자 김승구

❍ 설치비용 : 3,333천원

Ⅳ		처리의견

❍ 상기 검토결과에 의거 충격흡수시설 구매 및 설치작업을 『2017년 도로시설물일상유지보수공사(터널,지하차도,복개)』이전비 중에서

사용하고 추후 정산시 설계변경 반영코자 함.  끝.