＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신자	신부건설주식회사 대표이사 김남중 귀하
(경유)
제 목	'국제교류복합지구 시민참여관 건축공사' 공정관리 및 공사촉구

1. 우리시와 2017.6.21. 계약체결하여 공사중인 「국제교류복합지구 시민참여관 건축공사」와 관련입니다.

2. 귀사에서 착공시 제출한 공사 공정 대비 현재 공정이 매우 부진으로 인하여 우리시와 별도 계약하여 진행중인 전시콘텐츠 제작·설치(인테리어공사포함), 기계설비, 전기설비공사, 통신공사 등 후속 공종에 지장을 초래되고 있습니다. 이에 건축공사를 촉구하오니 공정만회 대책 등 특단의 조치를 하시기 바랍니다.

3. 아울러 공사현장 안전관리, 품질관리, 환경관리, 하도급자 관리 등 제반업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	우인식		공간계획팀장	오장환		동남권계획반장	07/21 강성욱
협조자	주무관	오상민
시행	동남권사업단-7597	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 5층	/
전화	02-2133-8236	/전송	02-2133-0740	/	wis@seoul.go.kr	/	대시민공개