함께 행복한 성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	3단계 창의적어린이놀이터 조성사업 설계변경 및 준공기한 연기 시행

우리 구에서 추진 중인 「3단계 창의적어린이놀이터 조성사업』에 대하여 다음과 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

1. 계약내용

건 명	도급자	도급비(원)	공사기간
3단계 창의적어린이놀이터 조성사업	㈜세계조경	193,636,000	2017. 3. 23. ~ 2017. 10. 18.

2. 설계변경

가. 변경사유 : 주민요구사항 및 현장여건반영, 보험료 정산 등

나. 공사비 증감내역

구 분	공 사 비 (원)			비 고
	당 초	변 경	증 감
총공사비	243,550,400	283,726,000	40,175,600
도급비	193,636,000	213,101,200	19,465,200
관급자재비	49,914,400	70,624,800	20,710,400

다. 예산과목

- 공원녹지과, 환경을생각하는푸른성북구현, 공원정비및관리, 어린이공원재정비,

시설비및부대비, 시설비(이월)

3. 준공기한 연기

가. 준공기한 연기사유 : 주민의견 추가반영 및 하절기 공사시행의 어려움 등으로

인해 공기가 부족한 실정임

나. 준공기한 변경

- 당초 : 2017. 3. 23. ~ 10. 18.

- 변경 : 2017. 3. 23. ~ 11. 30.

다. 지체상금 부과여부 : 귀책사유가 우리 구에 있으므로 미부과

붙 임   1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 계약심사결과통보 및 심사결과요약서 각1부.

3. 제비율검증대장 1부.

4. 설계변경 및 준공기한 검토보고 1부(별첨).

5. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

주무관							김한별				공원관리담당					김용은					공원녹지과장					이정환					도시환경국장						07/21 최태규
협조자				계약담당							代김진욱					재무과장							김영임
시행			공원녹지과-14993										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 (삼선동5가)																/			http://www.seongbuk.go.kr
전화		02-2241-3682							/전송			02-2241-6565					/	s21042@sb.go.kr													/	부분공개(5)