	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건축부장
(경유)
제 목	변경계약 체결통보[마포석유 비축기지 재생 및 공원조성 공사 건설폐기물처리용역]

1. 건축부-11817호(2017.07.10)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 사업 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 마포석유 비축기지 재생 및 공원조성 공사 건설폐기물처리용역

나. 변경계약 체결현황

구 분	당 초	변 경
계 약 자	다우이엔씨㈜ 외 1개사	변경사항 없음
계약금액	274,211,700원	변경사항 없음
공사기간	2016.4.14.~2017.7.13	2016.4.14.~2017.9.30

붙 임 : 변경계약서류 1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	권혜경		경리과장	최정수		건설총괄부장	07/21 이상국
협조자
시행	건설총괄부-17046	(		)	접수		(		)
우	04520	서울 중구 청계천로8 프리미어플레이스 빌딩 11층 건설총괄부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2371	/전송	02-3708-2365	/	ddingul@seoul.go.kr	/	부분공개(5)