문서번호	시설보수과-5821
결재일자	2017.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
한상신		박국남	07/24 송만규
협 조
	주무관			나철흠
	주무관			김부호

외부전문가 합동 자체정밀점검 완료보고

〔가락지하차도외 5개소〕

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

외부전문가 합동 자체정밀점검 완료보고

〔가락지하차도외 5개소〕

Ⅰ		점검개요

○ 대상시설물(6개소)

연번	시설명	종별	규 모		구조	설계 하중	노선명	준공년도	시설물 담당	외부 전문가
			폭 (m)	연장 (m)
1	가락지하차도	법정외	18	300	RC-Box	-	남부순환로	1985	한상신	동해종합기술공사 백중현외 2인
2	헌릉교	법정외	24 20	12	RCS	DB-18 DB-24	헌릉로	1971 2009	한상신
3	장지1교	법정외	50	26	RCS	DB-24	송파대로	1996	조장호	㈜이젠리버텍 강신정외 2인
4	잠실호수교	법정외	50	34	ARC	DB-24	송파대로	1981	조장호	다음기술단 천석현외 2인
5	오륜교	법정외	50	51.8	STB	DB-24	남부순환로	1986 2010	나철흠	대진컨설턴트 이상웅외 2인
6	상일2교	법정외	56.6	30	RA	DB-24	천호대로	2008	김부호	㈜엔스컨 신현동외 2인

○ 점검기간 : 2017. 5. 24 ~ 7 .22

○ 점검방법 : 시설물담담+외부전문가 합동 자체점검

Ⅱ		주요 지적사항

연번	시설명	부재명	주요 손상내용	단위	물량	보수․보강방안	비고
1	가락지하차도	교면포장	누수, 망상균열	m	195	매봉터널외 2개소 보수공사 시행
		옹벽	균열(0.3mm 이상)	m	388.7	주입보수
2	헌릉교	접속옹벽	철근노출	㎡	5	단면보수
3	장지1교	배수구	막힘 및 길이부족	m	1	청소 및 재설치
4	잠실호수교	교대	균열(0.3mm 이상)	m	1.5	주입보수
5	오륜교	교면포장	균열, 시공이음	m	99	씰링보수
		신축이음	토사퇴적	㎡	19.44	고압물 청소
6	상일2교	-	-

Ⅲ		순위별 개략공사비

(단위 : 천원, 제경비 제외)

시설명	계		1순위(단기)		2순위(중기)		3순위(장기)
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
계	129	158,826	22	53,858	28	61,925	79	43,043
가락지하차도	27	72,161	8	45,238	9	16,915	10	10,008
헌릉교	24	55,493	4	1,938	13	43,501	7	10,054
장지1교	27	1,928	2	271	1	3	24	1,654
잠실호수교	14	2,889	-		2	164	12	2,725
오륜교	22	19,062	8	6,411	3	1,342	11	11,309
상일2교	15	7,293	-		-		15	7,293

※ 세부내역은 붙임 “시설물별 개략공사비” 참조

Ⅳ		상태평가 결과

시설명	가락지하차도	헌릉교	장지1교	잠실호수교	오륜교	상일2교
등 급	B	B	B	B	B	B

Ⅴ		조치계획

○ 점검결과 주요 지적사항에 대하여 시설물 담당자가 “도로관리시스템”에 직접

입력조치하고, 자체정밀점검 보고서의 보수보강 개략공사비를 참고하여 아래와

같이 장단기 보수계획 및 향후 예산반영 등을 조치할 것.

- 청소 등 단순사항이거나 시급을 요하는 점검사항에 대하여는 ‘17년 도로시설물

일상유지보수공사(연간단가)에 작업지시하여 금년내 조치.

- 예산부족으로 정비가 곤란한 단기 및 중기에 대하여는 사안의 시급성에

따라 2018년도에 예산 반영하여 조치.

- 주의관찰을 요하는 중기 또는 장기에 대하여는 2019년 이후 검토.

○ 점검보고서 배부 : 교량안전과 1부, 도로시설과 1부, 도로관리과 1부.

Ⅵ		점검비 지급

○ 지급대상 : 외부전문가 백중현외 14인

○ 지급금액 : 44,350천원

○ 지급방법 : 외부전문가 개인별 계좌입금

※ 별도 “점검비 지급계획” 시행

○ 예산과목

- 도로시설관리, 도로시설물운영, 시설물안전점검및진단, 시설비(3,749천원)

- 교량관리, 교량시설물점검관리, 교량시설물안전점검및진단, 시설비(40,601천원)

붙 임  1. 자체정밀점검 시행계획 1부.

2. 지적사항 개략공사비 각 1부.

3. 성과품 각 5부(별도). 끝.