상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	광암아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관내노후건축시설물 보수공사 설계변경 시행

1. 우리 정수센터에서 시행중인『관내노후건축시설물 보수공사』에 대하여 설계변경 사항이 발생하여 별첨 설계도서와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공  사  명  : 관내노후건축시설물 보수공사

나. 공 사 내 역 : 표면처리 2,236㎡, 단면복구 48㎡, 균열보수 296m,

다. 도  급  자  : 국제화건(주) 대표 최진용

라. 계 약 일 자 : 2017. 5. 24

마. 공 사 기 간 : 2017. 5. 29 ～ 8. 6

바. 변 경 사 유 : 물량 증․감에 따른 설계변경

사. 변 경 내 역 : 별첨 변경 내역서 참조

아. 예 산 과 목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선교체비(수선유지비)

자. 변 경 내 역

(단위:원)

구 분	계 약 금 액	변 경 금 액	비 고
총공사비	175,648,570	175,552,000	감96,570
도 급 비	175,604,570	175,500,000	감104,570
폐기물처리비	44,000	52,000	증8,000

추산 : 7/24

따로붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 사유서 1부.  끝

주무관	김우승		주무관	윤충용		정수시설과장	代이해승		광암아리수정수센터소장	07/24 차윤기
협조자
시행	정수시설과-5937	(		)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)