투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	남부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 변경승인요청[강남순환도로(4공구)]

1. 남부도로사업소 도로보수과-5106호(2016.9.13.) 및 서울지방경찰청 교통관리과-16293호(`17.6.15)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인“강남순환도시고속도로(4공구)건설공사”와 관련

공사구간 내 교통안전시설물(안전표지, 노선표시) 원인자 부담공사에 대하여 변경 시행하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

가. 교통안전시설물 원인자 부담공사

1) 변경승인요청 내역

구 분	기정	변 경	비 고
공사기간	2016. 6.23 ~ 2016.9.30	2016. 6.23 ~ 2017.8.31
공사내역	노면표시(도색 및 제거) 18,316m	노면표시(도색 및 제거) 19,847m

2) 공사장소 : 시흥대로 기아대교 앞(변경없음)

3) 변경사유

- 2017.6.15.서울지방경찰청(교통관리과)의 교통안전시설 변경 설치통보에 따름

붙임 :  교통처리계획도 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	남덕희		토목부장	전결 07/24 김영수
협조자	도시고속도로과장	代박운용
시행	토목부-15582	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8666	/전송	02-3708-2599	/	heedeok@seoul.go.kr	/	대시민공개