상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	영등포아리수정수센터
수신자	행정관리과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰 (다목적 체육공간 조성공사)

우리 정수센터의 「다목적 체육공간 조성공사」시행 중 설계변경 사유가 발생되어 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건  명 : 영등포아리수정수센터 다목적 체육공간 조성공사

나. 계약자 : 다우리엔지니어링(주) 대표자 최경침

다. 기 간 : 2017.6.22. ~ 2017.7.31.

라. 설계변경 내용

(단위 : 원)
구 분	계약금액	설계변경금액	증 감	비 고
도급비	104,236,140	103,106,000	감 1,130,140

마. 설계변경 사유

- 보험료 등 실비정산에 따른 감액 조치

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙 임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 시행  1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 합의서 1부. 끝.

	영등포아리수정수센터소장
주무관	최재준		행정관리과장	代남상규		영등포아리수정수센터소장	07/24 이성락
협조자
시행	정수과-8263	(		)	접수		(		)
	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 (양화동1-29)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5649	/전송	02-3146-5691	/		/	대시민공개