투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	기전과장
(경유)
제 목	변경계약 체결통보(덕수궁 돌담길 회복사업 전기공사)

1. 기전과-8146(2017.07.24)호 관련입니다.

2. 귀 과에서 의뢰한 공사 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 덕수궁 돌담길 회복사업 전기공사

나. 변경 계약일자 : 2017.07.24

다. 발주(공사)담당 : 기전과  안광순

라. 변경 계약 체결현황

구분	당 초	변 경	비 고
계약상대자	도원이앤아이(주) *********	변경사항 없음	선행공정인 문화재청 및 토목공정 지연으로 인한 공사기간 연장
계약금액	************	변경사항 없음
공사기간	2017.06.07.~ 2017.0726	2017.06.07.~ 2017.08.30

붙임 : 변경계약서 1부.  끝.

	관리단속과장
주무관	윤미란		관리단속과장	07/24 안근
협조자	주무관	최경아
시행	관리단속과-9962	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 서부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8318	/전송	02-300-8337	/	miran0123@seoul.go.kr	/	부분공개(7)