투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰[여의도 지하벙커 개선 통신공사(1차)]

1. 설비부-12749(2017.7.24.)호와 관련입니다.

2.『여의도 지하벙커 개선 통신공사(1차)』 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 준공연기 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
1 차	`16.11.21. ~ `17.07.31.	`16.11.21. ~ `17.08.31.	31일 증
총 차	`16.11.21. ~ `17.10.20.	`16.11.21. ~ `17.10.20.	변경없음

나. 귀책 소재 및 연기사유

- 연기에 따른 귀책 소재 : 도시기반시설본부

- 지체상금 : 미부과

- 연기사유 : 선행공종인 건축공사 공정에 맟추어 작업시행으로 준공기한 연장

붙임  1. 준공기한 연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서(합의서 포함) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	성호준		열빛총괄과장	代성호준		설비부장	07/25 권오식
협조자	경리과장	최정수
시행	설비부-12819	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8602	/전송	02-3708-8659	/	junilove@seoul.go.kr	/	부분공개(5)