문서번호	도로시설과-9151
결재일자	2017.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널복개팀장	도로시설과장
전성민	김두석	07/25 박상돈

도로시설물 긴급보수 예산지원 검토 보고

(금천구 두산초교 앞 보도육교 외 1개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7.

안전총괄본부

도로시설과

도로시설물(자치구) 긴급보수 예산지원 검토보고

(금천구 두산초교앞보도육교 외 1개소)

금천구에 위임관리되고 있는 도로시설물 관련 보도육교 정비에 소요되는 예산지원 요청에 대한 검토 보고임.

- 두산초교앞보도육교

- 금천보도육교

[관련근거 : 금천구 도로과-12918호(2017.07.19.)]

□ 자치구 예산 지원 요청 및 배정 내역

대상시설		두산초교앞보도육교	금천보도육교
요구액	426	298(백만원)	128(백만원)
배정액	380	298(백만원)	82(백만원)
보수내용		- 계단·난간·바닥 철거 및 신설 - 주형부 재도장	- 강교기둥 2개 보강(추가) - 주형부 재도장

□ 시설물현황

시설물명	위 치	규 모		형 식	관리기관	설치년도	안전등급
		폭	연장
두산초교앞 보도육교	독산동1002-5	4m	26m	STB	금천구청	1992	D등급
독산역 두산초교앞보도육교

시설물명	위 치	규 모		형 식	관리기관	설치년도	안전등급
		폭	연장
금천보도육교	가산동687	2m	120m	STB	금천구청	2000	C등급
금천보도육교 독산역

□ 추진경위

○ ´16.12.22. : 도로시설물(보도육교) 보수·보강 필요시설 제출(금천구→市)

○ ´17.02.01. : 현장조사

○ ´17.05. ~ 07. : 실시설계용역 시행

○ ´17.07.20. : 예산 재배정 요청(금천구→市)

□ 검토의견

○ 총 요구액(426백만원)에서 46백만원을 감하고 380백만원을 배정코자 함

○ 두산초교앞보도육교(요청액 298백만원, 재배정액 298백만원)

- 1992년 준공, 시설물안전등급 “D”

- 정밀안전진단용역 및 현장확인 결과 체수로 인해 강재 및 교각하판, 계단하부 등이 심하게 부식되고 시설물 노후

- 내구성 확보를 위해 전체적인 보수가 시급한 것으로 판단됨.

○ 금천보도육교(요청액 128백만원, 재배정액 82백만원)

- 2000년 준공, 시설물 안전등급 “C”

- 보행 시 진동에 대한 민원이 지속적으로 발생

- 정밀안전진단용역 결과 진동에 대한 보강대책 및 강교재도장 등 내구성 확보 조치가 필요한 것으로 판단됨.

- 다만, 가용예산 규모 및 보수의 시급성을 고려하여 우선 주형전면도장 대신 부분도색으로 보수 규모를 축소토록 권고하고

- 향후 낙찰차액 등 활용을 모색하도록 함

○ 시도 상에 있는 보도육교는 서울시 소유의 시설물이며 유지관리는 자치구에 위임되어 예산지원 가능함.

※ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제47조(비용의 지원)

- 자치구 위임 도로시설물 관리비용 부담방법 개선(도시안전실장방침-10030호, ´14.6.9)

⇒ 구조 안전에 관한 비용

⇒ 강구조 부식방지 예방과 관련된 유지관리비용(도장, 포장 포함)

□ 처리계획

○ 2017년  도로시설물(자치구 위임관리)긴급보수예산에서 지원하여

○ 구조안전에 관한 사업비(380,000천원)를 재배정코자 함.

○ 예산현황

(단위 : 천원)
2017년 예산액	기배정액	배정 가능액	금회 배정액	배정잔액	재배정처	비고
5,000,000	3,343,525	1,656,475	380,000	1,276,475	금천구청

붙임 : 1) 보수·보강 공사 예산 요청 공문 1식.

2) 사업설명서(금천구).

3) 설계내역서(조정된 내역). 끝.