문서번호	도로보수과-7801
결재일자	2017.7.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
박성근		김권일	07/25 김용제
협조

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 제4차 작업지시 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 7

강서도로사업소

(도로보수과)

2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

제4차 작업지시 완료 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2017년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2017. 3. 15. ~ 2017. 12. 15.

○ 시공업체 : (주)지아이엘건설  대표 김용이

○ 도 급 비 : 730,323,000원

□ 작업완료 보고

○ 건    명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제4차, 추가분)

○ 작업위치 : 강서구 방화동 500-14(개화사거리)주변 외 24개소

○ 작업기간 : 2017. 06. 07. ~ 2017. 07. 31.

○ 공사금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	71,243천원	50,831천원	감) 20,412천원
관 급 비	28,998천원	21,945천원	감) 7,053천원
총 공사비	100,241천원	72,776천원	감) 27,465천원

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	가양대교 분기점 (발산역 방향)	653	558	감) 95	현장실측 물량차이
2	양화 인공폭포~올림픽대로 염창JC 연결도로	1,286	1,818	증) 532	과속방지턱 및 중앙선, 차선 누락
3	개봉역 1번출구 앞 개봉지하차도 주변	1,943	1,668	감) 275	현장실측 물량차이

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
4	남부순환로 (구로고가차도-구로ic방향 교차로)	2,007	1,450	감) 557	안전지대 제외
5	강서구 방화동 500-14 개화사거리	812	420	감) 392	차로 밑그림 제외
6	강서구 공항대로 290 앞 외 발산역 주변	432	216	감) 216
7	구로구구로동701-2 봉황카센터앞	78	47	감) 31
8	양천구 신목로 120 앞	207	0	감) 207	보고내용 참조
9	영등포구 선유로 314 주변 마포구 양화대교(북→남 방향)	615	357	감) 258	차로 밑그림 제외
10	양천구 목동동로 87 (신정동, 양천구민체육센터)	472	168	감) 304
11	영등포구 도림로 482 문래동 사거리 ~ 근로자회관 교차로 구간	432	228	감) 204
12	영등포구 영중로 169 (당산역 리버리치 오피스텔 앞)	52	42	감) 10
13	영등포구 당산로 142-1 (영등포구청 사거리)	473	337	감) 136
14	영등포구 국회대로62길 4 (국회의원회관 사거리)	136	196	증) 60	유도선 재도색 차로 밑그림 제외
15	양천구 양천우체국 앞 (목동서로 131 앞)	120	78	감) 42	차로 밑그림 제외
16	양천구 신정네거리역R (중앙로 280 앞)	150	152	증) 2	현장실측 물량차이
17	구로구 서해안로34가길 3 (대진빌라 앞)	66	33	감) 33	차로 밑그림 제외
18	강서구 방화동 623-5 (김포공항입구 앞)	196	98	감) 98
19	강서구 가양동 14-53 (가양역 교차로)	66	46	감) 20
20	영등포구 당산동 121 주변 여의도동 여의하류IC 주변	2,390	1,936	감) 454
21	강서구 공항대로45길 68-6(등촌동 서광아파트 앞)	6,665	357	감) 6,308	보고내용 참조
22	강서구 가양동 488 (가양대교 남단) 주변	150	150	-
23	외발산 사거리 주변	250	247	감) 3	현장실측 물량차이
24	양천구 목동서로 143 청소년수련관 주변	1,388	0	감) 1,388	보고내용 참조
25	서해안로 (오류남초교~현대홈맨션) 주변	15,731	13,362	감) 2,369	보고내용 참조
합 계		36,770	23,964	감) 12,806

○ 보고내용

- 제4차 작업지시 25개소 중 23개소에 대해 작업완료하였음.

- 작업지시를 보류한 연번 8(양천구 신목로 120 앞) 노면표시 제거 및 신설 구간은 무단횡단금지시설 철거 후 작업시행 하고자 하며,

- 연번 24(양천구 목동서로 143 청소년수련관 주변) 노면표시 제거·신설·재도색구간은 양천경찰서 측에서 규제심의를 거치지 아니하고 요청한 사항으로 규제심의 완료 후 작업시행 하고자 함(붙임참조).

- 연번 21(강서구 공항대로45길 68-6) 노면표시 제거 및 신설구간은 실시설계 용역(교통운영과)시 노면표시 과다 물량설계(현장실측 반영)

- 연번 25(서해안로-오류남초교~현대홈맨션) 개봉역 방향 노면표시 중 상태가 양호한 주차금지대 및 차선은 재도색 제외.

□ 검토결과 및 조치계획

○ 위 보고내용 중 일부 물량 변경이 불가피하여 현장여건에 적합하게 완료하였으며, 작업완료량에 대해서는 추후 정산처리 하고자 함.

붙 임  1. 제4차 작업완료 내역서 1부.

2. 제4차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제4차 작업완료 도면 1부(별도첨부).

4. 규제심의 관련 공문 각 1부.  끝.