문서번호	동북권사업단-7497
결재일자	2017.7.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	동북권발전기획팀장	동북권사업반장		동북권사업단장
양효진	오대중	한병준		07/26 이정화
협 조

- ‘창동 · 상계 선도사업 마스터플랜 및 세대융합형 복합화 사업 -

설계공모 관리 용역 준공기한 연기 보고

2017. 7.

동북권사업단

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

- ‘창동 · 상계 선도사업 마스터플랜 및 세대융합형 복합화 사업 -

설계공모 관리 용역 준공기한 연기 보고

설계공모에 참여한 지명 건축가의 초청대가 지급과 관련하여 해외 건축가로부터 필요서류 제출 등에 추가기간이 필요함에 따라 설계공모 관리 용역의 준공기한을 연장하여 용역 추진에 만전을 기하고자 함.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 :「창동·상계 선도사업 마스터플랜 및 세대융합형 복합화사업」지명 현상설계 공모 관리용역

○ 용역업체 : 주식회사 디자인 오아시스

○ 계약금액 : 510,500천원 (※ 지명건축가 초청 비용 390,000천원 포함)

○ 용역기간 : ’16.12.30. ~ ’17. 7.31.

○ 과업내용

- 국제 지명 현상설계 공모 시행을 위한 기획, 홍보, 진행, 심사 및 선정 등 설계공모 시행 업무와 관련된 일체의 제반사항 (지명초청비 지급 포함)

- 공모를 위한 설계지침서 작성 및 자료제공 일체 준비

□ 추진 경위

○ ‘16.10. 7.            : 공모 관리용역 시행방침 수립

○ ‘16.11.  2. / 11.25. : 공모 관리용역 입찰 (재)공고

○ ‘16.11.11. / 11.23. : 건축정책위원회 및 소위원회 자문

○ ‘16.11.29.            : 건축위원회 심의

○ ‘16.12.30.            : 용역 계약 · 착수

○ ‘17.  1.                : 공모 전문위원회 구성 · 운영(~’17. 3.)

○ ‘17.  2. 6.            : (2단계) 설계공모 추진계획 방침(도시공간개선단)

○ ‘17.  3. ~ 4.         : 1단계 일반 공모 · 당선작 선정

○ ‘17.  4. ~ 5.         : 2단계 지명 공모(7팀: 국내 4, 해외 3)

○ ’17.  6.12.            : 최종 당선작 발표

○ ’17.  6. ~ 7.         : 시상식 및 공모작품 전시회, 지명초청료 지급 추진

□ 계약 변경 검토

○ 변경내용 : 용역기간 1개월 연장

- 당초 : 2016. 12. 30. ~ 2017. 7. 31.

- 변경 : 2016. 12. 30. ~ 2017. 8. 31.

○ 계약금액 : 변경없음

○ 변경사유 : 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유

- 해당 국제 지명 설계공모에 참여한 해외 참가업체 3곳 중 2곳이 업체 내부 사정으로 초청대가 지급에 필요한 서류 제출이 지연되고 있으므로 부득이 용역 기간을 연장하여 초청대가 지급 등 용역 추진에 만전을 기하고자 함.

※ 관련규정:「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제14장 용역계약일반조건 제7절 1. 지연배상금 및 2. 계약기간의 연장

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 행정사항

○ 계약변경 의뢰 : 재무과

붙임 : 계약 연장 요청 공문 및 합의각서, 첨부자료 각1부.  끝.