문서번호	서울특별시농업기술센터-11623
결재일자	2017.7.27.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관	기획홍보팀장	농업교육과장	농업기술센터소장
임영준	이연미	김종비	07/27 권혁현
협 조

냉난방시스템 개선에 따른 현황사항 보고

2017. 7.

서울특별시농업기술센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

냉난방시스템 개선에 따른 현황사항 보고

냉·난방시스템 개선으로 화장실·당직실·식당휴게실 난방 및 센터 급탕을 경유보일러에서 전기히트펌프방식으로 개선코자 하였으나, 성능 및 추후 확장성이 미흡하여 설치를 변경 예산절감 및 효율성을 증대하고자함.

1		관 련 근 거

□ 냉난방시스템 개선 계획[서울시농업기술센터-7997(2017.5.25.)]

2		현 안 사 항

□ 센터 청사내 냉·난방시스템은 개선완료 하였음

○ 전기히트펌프 냉난방용 실내기 19대, 실외기 3대 설치

□ 급탕시스템(난방기능 포함)은 현장 적용시 난방·급탕 겸용 성능이 미흡하고 추후 시스템에어컨 추가 설치도 불가한 사항임

○ 전기히트펌프 급탕용 실내기 1대, 실외기 1대 미 설치

3		조 치 사 항

□ 냉·난방시스템은 설치 완료에 따라 검수조치하고, 급탕시스템(난방기능 포함)은 설치 취소 처리

○ 조달구매 변경 신청 : 변경물량 붙임 참조

항 목	당초금액	변경금액	증 감 액	비 고
냉난방 및 급탕시스템 구매설치(조달구매)	79,507,030	68,831,630	▽10,675,400	전기히트펌프 급탕용 실내기 및 실외기 각 1대 설치 취소

□ 경유보일러에 의한 급탕 및 난방 방식은 최소 기능만 유지 축소 운영, 급탕시스템(난방기능 포함)개선은 향후 별도 계획 수립 추진

붙임 : 조달구매 변경 물량 1부(별도 첨부). 끝.