＂서울의 도시 실험, 2017 서울도시건축비엔날레!＂
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 변경계약 의뢰(창동·상계 설계공모 관리용역)

1. 동북권사업단-7497호(2017.07.26.)와 관련입니다.

2.「창동·상계 선도사업 부지 마스터플랜 및 세대융합형 복합화사업 현상설계 공모관리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하니 변경계약 등 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 창동·상계 선도사업 부지 마스터플랜 및 세대융합형 복합화사업 현상설계 공모관리용역

나. 변경내용 : 준공기한 연기(※ 준공기한 외 변경내용 없음.)

- 당초 :‘16.12.30.~‘17.7.31

- 변경 :‘16.12.30.~‘17.8.31.

다. 변경사유 : 붙임 ‘준공기한 연기의뢰서’ 참조

붙임 : 1) 준공기한 연기의뢰서 1부

2) 용역 계약기간 연장 방침 1부

3) 합의각서 1부.  끝.

	동북권사업단장
주무관	양효진		동북권발전기획팀장	오대중		동북권사업반장	07/27 한병준
협조자
시행	동북권사업단-7526	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동 96) 프리미어플레이스빌딩 5층	/
전화	02-2133-8282	/전송	02-2133-0740	/	yanghj@seoul.go.kr	/	부분공개(5)