문서번호	시설관리과-20517
결재일자	2017.7.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
노운학		박종일	최명익		07/27 이구석
협 조
	급수운영과장			代배성호
	주무관			권기섭

『2018년 대현산배수지 외 10개소』

정밀안전진단 등 용역 추진계획 보고

2017.  7.

동부수도사업소

『2018년 대현산배수지 외 10개소』

정밀안전진단 등 용역 추진계획 보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의거, 2018년 대현산배수지 외 10개소에 대해 아래와 같이 정밀안전진단 등 용역을 시행하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : 본부 시설관리과-6447호(2017.07.17.)호와 관련 임.

- 제  목 : 2018년 기술용역타당성 심사요청 안내(정밀점검 및 정밀안전진단)

▢ 용역개요

◦ 용 역 명 : 대현산배수지 외 10개소 정밀안전진단 등 용역

◦ 용역대상

- 정밀안전진단

·배수지 : 대현산, 용마, 용마(소)

·가압장 : 대현산, 용마

- 정밀점검

·배수지 : 아차산, 아차산(소)

·가압장 : 아차산

- 내진성능평가

·대현산배수지 및 가압장

- 실측도면 작성

·용마(소)배수지

◦ 용역기간 : 2018. 05 ~ 2018. 10.(180일)

◦ 용역금액 : 384,890천원(타당성 심사전 설계금액 임)

▢ 대상 시설물 현황

구 분	시설물명	시설용량 (㎥)	준공년도	등 급	전차 용역현황 (용역사)	비고
배수지	대현산	200,000	2002	B등급	2015년 대현산배수지,용마배수지, 용마(소)배수지, 용마가압장 (세안안전진단) 2016년 아차산배수지,아차산(소)배수지, 아차산가압장 (에스큐엔지니어링)
	아차산	100,000	1993	B등급
	아차산(소)	4,000	1992	B등급
	용마	80,000	2002	B등급
	용마(소)	6,000	2002	B등급
가압장	대현산	53,000㎥/일	1993	B등급
	아차산	7,300㎥/일	1992	B등급
	용마	12,000㎥/일	2002	B등급

▢ 정밀점검 및 안전진단 실시주기

◦ 관련근거 : 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제6조 및 제7조

<정밀점검 및 정밀안전진단의 실시 주기>

안전등급	정 밀 점 검		정밀안전진단	비 고
	상 수 도	건 축 물
A등급	3년에 1회 이상	4년에 1회 이상	6년에 1회 이상
B·C등급	2년에 1회 이상	3년에 1회 이상	5년에 1회 이상
D·E등급	1년에 1회 이상	2년에 1회 이상	4년에 1회 이상

※ 정밀점검 : 경험과 기술을 갖춘 자가 육안이나 점검기구 등으로 심사하여 시설물에             내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위.
※ 정밀안전진단 : 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고             적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·             평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하는 행위

▢ 계약 및 입찰방법

◦ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

◦ 입찰참가 자격

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제9조 및 동법 시행령 제11조 규정에 의거 안전진단 전문기관(수리시설분야)으로 등록을 필한 업체.

- 건설산업기본법 제9조에 의거 시설물의 유지관리를 업종으로 등록한 건설업체로서 시특법 시행령 제7조 규정에 의거 국토해양부장관이 인정하는 안전점검 및 정밀안전진단 교육(수리시설분야)을 이수한 책임기술자를 보유한 업체

※ 시특법』시행령 제9조 3항에 의거 해당 시설물을 설계·시공 또는 감리한자의 계열회사인 안전진단 전문기관이나 해당 관리주체에 소속되어 있거나 해당 관리주체의 자회사인 안전진단전문기관에 의뢰하여서는 아니 된다.

▢ 향후 추진계획

◦ 2017.  7. 기술심사담당관 기술용역 타당성 심사요청

◦ 2017.  8. 기술심사담당관 심사결과 본부 보고

◦ 2018.  4. 행정지원과 계약의뢰

◦ 2018.  4. 계약 및 착수

◦ 2018. 10. 용역준공

따로붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 용역설명서 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 2018년 안전진단 대상 안내 공문(본부 시설관리과). 끝.