문서번호	교통운영과-14439
결재일자	2017.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		신호시설팀장	교통운영과장
이귀섭		구봉서	07/27 강진동
협조

	내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역 준공기한 연기 검토보고

2017. 7.

교통운영과

(신호시설팀)

내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역

준공기한 연기 검토보고

내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기공사 감리용역을 내곡보금자리주택 지구계획 변경 및 여의천 인도교 설치로 교통신호기공사 준공일까지 감리용역을 연기코자 함

[관련근거 : 서울주택도시공사 전기공사부–2886호 (2017.7.26.)]

□ 용역 개요

❍ 용 역 명 : 내곡지구 택지 및 양재동시프트 교통신호기 감리용역

❍ 용역금액 : 금182,158,000원

❍ 용역기간 : 2013.9.10.~2017.07.31.

❍ 계 약 자 : 대영유비텍(주) (대표 조근환)

□ 보고내용

❍ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비고
계약기간	2013.09.10.~2017.07.31.	2013.09.10.~2017.12.29.

❍ 준공기한 연기 사유

- 교통신호기 감리용역 계약기간 연기 요청[서울주택도시공사 전기공사부–

2886호(2017. 7. 26)]

- 내곡보금자리주택 지구계획변경 및 여의천 본마을 인도교 설치로 교통신호기공사 감리용역을 신호등공사(도급공사) 준공기한까지 연기하고자 함

□ 향후 추진일정

❍ 재무과로 준공기한 연기 의뢰

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

3. 교통신호기 감리용역 계약기간 연기요청 공문사본 1부.

[서울주택도시공사 전기공사부–2886호(2017.7.26.)] 끝.