문서번호	조경과-4184
결재일자	2017.7.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
최혜진	김효준	代강금완	박진순		전결 07/28 송천헌
협 조
	전략기획실장			김정열
	총무과장			이행용

장미원 및 식물원 관람환경 개선사업 -

설계변경 사항 검토보고

2017. 7.

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

장미원 및 식물원 관람환경 개선사업 -

설계변경 사항 검토보고

「장미원 및 식물원 관람환경 개선사업」추진과 관련, 실정보고에 따른 설계변경 사항을 검토보고함

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 장미원 및 식물원 관람환경 개선사업

○ 기    간 : 2017. 4. 28 ~ 7. 31

○ 위    치 : 장미원 및 식물원 일대

○ 내    용 : 조경 식재 및 시설물 공사

○ 도 급 액 : 271,118,500원(관급비 별도 46,290,000원)

○ 도 급 자 : ㈜유일종합조경 대표 김옥경

□ 변경내용

○ 일반공사

- 경관향상 및 지형단차 극복을 위한 목재가림막, 게비온 등 설치

- 식생 유지관리의 편의를 위한 자동스프링쿨러 설치

- 주변 마감정리를 위한 수목 및 초화류 식재물량 변경 등

구분	세부내용	금액(원)
계		37,572,500
제경비		9,335,274
시설물	· 플랜터옹벽 변경/추가(블록식옹벽→게비온월)	19,275,734
	· 자동스프링쿨러 추가(0식→1식)	9,000,000
	· 목재가림막 추가(0㎡→31㎡)	4,650,000
	· 수목라벨 삭제(40개소→0개소)	▲1,960,320
	· 볼라드등 삭제(10개소→0개소, 시설과 설치)	▲37,730
	· 방부목 경계 삭제(3m→0m)	▲270,020
포장	· 인조사암블럭 면적(242㎡→284㎡)	326,208
식재	· 수목류 물량(9종1,885주→9종1,797주)	9,334
	· 초화류 물량(22종7,040본→31종11,158본)	▲3,473,971
	· 잔디(평떼) 면적(240㎡→350㎡)	717,991

○ 관급자재

- 잔디마당 목재 앉음벽 단차에 따른 일부구간 난간 추가 설치

- 초화원 중앙쉼터, 음수전 등 공간확보에 따른 포장면적 증가

- 식재시기(계절)를 감안하여 종류 변경 등

구분	세부내용	금액(원)
계		▲1,682,000
시설물	· 하드우드난간 추가(11경간→15경간)	1,327,128
	· 볼라드등 삭제(10개→0개)	▲4,524,300
	· 경계석 단가 조정	▲36,677
포장	· 인조사암블럭 면적(할증3% 적용) (249.5㎡→293㎡/ 옐로우→베이지)	1,661,926
식재	· 프렌치라벤더 → 그라스류(5종), 숙근초화류(11종)	▲110,077

□ 처리계획

○ 현장여건 등에 따른 상기 변경사항에 대하여 집행잔액(공사 낙찰차액 37,572,500원)을 사용하여 설계변경 시행코자 함

구분	변경 전	변경 후	비고
계	317,408,500	353,299,000
계약금액	271,118,500	308,691,000	+37,572,500
관급자재	46,290,000	44,608,000

붙임 : 변경내역서 1부.  끝.