문서번호	어르신복지과-14207
결재일자	2017.7.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		돌봄시설팀장	어르신복지과장
김창연		홍순옥	07/28 代강재신
협조

서울시 동북어르신돌봄종사자지원센터

개보수공사 발주 계획

2017.  7.

복 지 본 부

(어르신복지과)

서울시 동북어르신돌봄종사자지원센터

개보수공사 발주 계획

서울시 동북어르신돌봄종사자지원센터(강북구 도봉로 172) 임대차계약을 추진하고 아래와 같이 개보수공사를 추진하여 운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 동북어르신돌봄종사자지원센터 임대차(설치) 계획   : ‘17. 4. 20.

□ 동북어르신돌봄종사자지원센터 임대차 계약 체결    : ‘17. 5. 29.

Ⅱ		공사개요

□ 위    치 : 서울시 강북구 ********************

□ 규    모 : 총 311.22㎡(전용면적 267.3㎡)

□ 공사내용 : 사무실 개보수공사

○ 가설공사, 철거공사, 칸막이공사, 판넬공사, 바닥공사, 도장공사, 금속공사,

위생기구공사, 기타공사

□ 공사기간 : ’17.7.~8월(착공일로부터 30일간)

□ 공 사 비 : 77,100천원

○ 예산과목 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화, 독거․재가 어르신 종합서비스 확대, 재가노인복지시설 운영,사무관리비(100-201-01)

Ⅲ		세부공사내용

□ 가설공사 : 7,992천원

- 조립비계설치(높이2m), 건축물현장정리, 자재운반, 철물대설치

□ 철거공사 : 2,264천원

- 화장실 세면대·양변기 철거

□ 칸막이공사 : 17,907천원

- SGP경량칸막이(T100, 유리, 문), 접이식도어, 도어핸들

□ 판넬공사 : 7,763천원

- 필름난방(전기), 단면단열재, 아트보드(1200*2400) 설치

□ 바닥공사 : 9,449천원

- 사무실 바닥 우드타일깔기, 걸레받이붙임(무늬목쉬트)

□ 도장공사 : 3,353천원

- 비닐페인트(롤러칠), 수성페인트(붓칠), 유성페인트(기존문틀)

□ 금속공사 : 1,930천원

- 방화문(현관,화장실)설치, 번호키, 손잡이, 도어체크달기, 도어스톱

□ 위생가구공사 : 2,560천원

- 화장실(양변기,소변기,세면기)설치, 수납장, 거울, 수도꼭지, 씽크대연결호스

□ 기타공사 : 1.745천원

Ⅳ		공사발주계획

□ 계약방법 : 전자공개수의계약(2천만원이상~1억원이하)

□ 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제25조 제1항 5호

□ 참가자격 :「건설산업기본법」에 의한 실내건축공사업 등록업체로서, 주된 사무소가 서울특별시에 소재하고 있으며, 시설물 관리업 공사를 시행할 수 있는 자

※ 공사금액이 1억원 이하의 소액이며, 공사의 시급성을 고려하여 과업수행 경험이 있는 시공자와 우선협상

Ⅴ		향후추진일정

□ 공사발주 : ‘17. 7. 28.

□ 공사계약 및 착공 : ‘17. 7. 31.

□ 공사준공 : ‘17. 8. 11.

붙임 : 공사설계내역서 1부.  끝.