문서번호	한양도성도감-7809
결재일자	2017.7.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
정윤모	곽동진	07/28 심말숙

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성사업」

관계부서회의 결과보고

2017. 7.

문  화  본  부

(한양도성도감)

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성사업」

관계부서회의 결과보고

「남산 회현자락 한양도성 현장유적박물관 조성사업」의 실시설계 및 공사 시행 관련 현안 및 협조사항 논의를 위해 관계부서 회의를 개최 하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의 개요

□  일    시 : 2017. 7. 27(목) 11:00~11:50

□  장    소 : 한양도성도감 회의실

□  참 석 자

- 한양도성도감 : 한양도성도감과장, 도성관리팀장, 담당자(정윤모)

- 공원조성과 : 생활공원팀장, 담당자(김상엽)

- 중부공원녹지사업소 : 시설과장, 조경팀장(이무림)

□  회의내용

- 사업부지내 기존 화장실 철거 및 신축에 관한 사항

- 실시설계 및 공사 시행 관련 관계 부서간 협조사항

- 임야부 구간 보존·정비공사 등 진행 및 협조사항 등

Ⅱ		회의 결과

1. 사업부지내 기존 화장실 철거 및 신축에 관한 사항

□ 공원내 기존 화장실 철거 및 신축 행위는 도시공원위원회 심의를 득해야 하는 사항임

□ 기존 지상 화장실을 경사지를 이용하여 지하층으로 이전 신축하는 안도 경관상 고려해볼만 하니, 2가지 안(현상태로 존치, 이전 신축)을 비교검토하여 차기 TF회의에 상정

2. 실시설계 및 공사 시행 관련 관계 부서간 협조사항

□ 실시설계에 대한 도시공원위원회 심의 관련 사항

- 개최시기 : 매월 1회(셋째주 화요일)

- 심의 개최 15일전 심의 자료 제출(첫째주 월요일)

- 심의 상정 전 공원조성계획 변경(안) 열람공고(14일간) 절차 이행

(심의 상정 20일 전까지 공원조성계획 변경 입안권자인 중부공원녹지사업소로 관련 자료 제출)

- 심의 소요기간 : 약 2개월 ~ 2.5개월

□ 실시설계 및 도시공원위원회 심의 자료 사전 자문 등을 위해 도시공원위원회 심의 위원 2인 TF회의 참석 필요

- 참석 심의 위원 공원조성과에서 추천 협조

□  실시설계 및 공사시행 관련 TF회의시 관계부서 참석 및 자문

□  공원조성계획 변경 협의, 열람공고 등 추진

3. 임야부 구간 보존·정비공사 등 진행 및 협조사항

□ 임야부 구간 공사는 성벽 보존·정비공사 완료 후 타절하고, 현장유적박물관 조성공사와 임야부 구간 순성로 공사는 실시설계 결과에 따라 별도 시행 추진

□ 회의 사진

Ⅲ		행정 사항

□ 관계 부서 협조 사항

- 공원조성과

∙ 실시설계 및 공사시행 관련 TF회의시 참석 및 자문(생활공원팀장, 담당자)

∙ TF회의에 참여할 도시공원위원회 심의 위원(2인) 추천

∙ 실시설계 관련 공원조성계획 변경(안) 검토 및 협의 등

- 중부공원녹지사업소

∙ 실시설계 및 공사시행 관련 TF회의시 참석 및 자문(시설과장, 조경팀장)

∙ 공원조성계획 변경(안) 열람공고 등 입안절차 진행

∙ 임야부 구간 성벽 보존·정비공사 시행 완료 등

□ 회의결과에 대해 관계 부서(공원조성과, 중부공원녹지사업소)에 통보

□ 회의 비용(오찬) 지출 : 132,000원

- 참석인원 : 한양도성도감 과장외 7인

- 지출장소 : 어미가(서울 중구 서소문동 26경서빌딩 202)

- 지출방법 : 한양도성도감 법인카드로 결재 후 매출전표 첨부 정산처리

- 예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존 관리 활용, 한양도성 세계유산등재 및 시민 참여 활성화, 한양도성 자문위원회 운영, 사무관리비

붙임 : 회의 자료 1부. 끝.