	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	구로소방서 환경개선 및 자가주유시설 설치공사 설계변경 계약 결과보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-10609호(2017. 7. 28)호 『청사환경개선 및 자가주유시설 설치공사 설계변경 계약 요청』

나. 지방계약법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

2. 위와 관련 우리서 청사 환경개선 및 자가주유시설 설치공사에 대하여 현장여건변동과 설계누락 요구사항 등에 대하여 지방계약법 시행령 제74조 근거에 의거 변경계약체결 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 계 약 명 : 구로소방서 환경개선 및 자가주유시설 설치공사

나. 계약기간 : 2017. 6. 12. ~ 2017. 7. 31.(착공일로부터 50일)

다. 설계변경 계약금액 내역

구분	변경내용			비고
	변경전	변경후	증·감
건축공사	162,496,300원	159,058,760원	3,437,540원	낙찰율 87.750% 적용

라. 설계변경 내용 : 붙임 설계변경 사유서 참조

붙 임   1. 변경 전·후 계약서 사본 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 청렴이행서약서 등 1부.

4. 계약보증서 1부.  끝.

5. 공사계약일반조건 등 계약문서(종이문서) 각 1부.  끝.

담당자	조성현		장비회계팀장	원용기		소방행정과장	안서용		소방서장	07/28 장현태
협조자
시행	소방행정과-10628	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 (고척동)	/
전화	02-2684-8119	/전송	02-2619-3102	/	watergun@seoul.go.kr	/	부분공개(6)