문서번호	시설관리과-17669
결재일자	2017.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김일구		07/31 박은선
협조

공사 실정보고서 검토보고 (잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사)

2017. 07.

공사 실정보고서 검토 보고

ㅡ

『잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 감독을 시행하는 서울특별시 시설관리공단으로부터 공사실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.(공사감독2처-7620, `17.7.28)

공사현황

가. 공 사 명 : 잠원동 50-1외 6개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2017. 05. 23. ~ 2017. 11. 28.

다. 도 급 액 : 628,755,900원

라. 공사개요 : D=150~300mm,  L=2,400m

마. 도 급 자 : ㈜일승토건 대표 박명환

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단 공사감독2처

사. 발 주 청 : 강남수도사업소 시설관리과

실정보고 현황

가. 4구간 청동게이트밸브 추가 시공

1) 현황 및 문제점

- 4구간 차도 구간에 직관부설 및 보도에 부설된 기존 인입관 연결시 차도 구간을 2회 굴착해야하는 실정으로 교통 통제 등 시민불편 발생 예상

2) 검토의견

- 직관부설 시 새들천공하고 보도부까지 인입관 부설 후 말단에 청동게이트밸브 설치하여 추후 인입관 연결토록 변경코자 하는 시설관리공단 검토의견 타당함

- 개략공사비 : 증) 약 430천원

나. 4구간 중간밸브 추가 시공

1) 현황 및 문제점

- 당초 종점부(방배동 872-4) 기존관 연결 설계는 절단 후 연결토록 설계되어 있어 시공시 단수범위가 넓어 방배역 주변 상가 영업에 지장 초래

2) 검토의견

- 방배역 주변 상가 영업민원 발생 예방 및 단수범위 최소화를 위하여 종점부에 중간밸브를 신설코자하는 시설관리공단 검토의견 타당함

- 개략공사비 : 증) 약 810천원

나. 4구간 분기지점 원형변실에서 중형변실로 변경

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계에 방배동 872-3번지 앞 분기지점에 원형변실로 시공토록 계획되어 있으나, 굴착 확인한 바 주변 지장물(통신과, 하수관 등)로 인하여 원형변실 설치공간이 부족한 실정

2) 검토의견

- 원형변실을 중형변실로 변경 시공코자 하는 시설관리공단 검토의견 타당

- 개략공사비 : 감) 약 320천원

실정보고 검토의견

가. 상기 보고내용과 같이 시설관리공단의 검토의견이 타당하다고 사료됨

조치 계획

나. 상기 검토의견과 같이 분기방법 변경에 대하여 우선 공사시행하고, 향후 설계변경에 반영토록 서울특별시시설관리공단에 회신코자 함.

붙임 : 공사실정보고서 제출 1부.  끝.