투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	변경계약(1차2회,2차1회)의뢰-사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

1. 시설보수과-6691(2017.7.28.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)』에 대한 설계변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 사천교 확장 및 성능개선공사(장기계속)

나. 공사기간 : 2016. 4. 12 ~ 2017. 10. 11.

다. 계 약 자 : 신안종합건설 대표 박순석

라. 설계변경 내역                                           (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감
총 차	3,302,821,000	3,524,600,000	증)221,779,000
1차(정산)	2,609,000,000	1,764,000,000	감)845,000,000
2차	693,821,000	1,760,600,000	증)1,066,779,000

마. 예산과목

- 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(교통사업특별회계), 사천교 확장, 시설비 및 부대비, 시설비(▲74,657,000)

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리(도시개발특별회계), 사천교 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비(▲147,122,000)

바. 설계변경 사유

- 사천교 확장 및 성능개선공사 실정보고에 따른 시공물량 증·감 등

붙임 : 1. 설계변경 시행 품의서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 설계변경 내역서(1차,2차) 각1부.

4. 제비율검증 확인서(1차,2차) 각1부.

5. 합의각서 1부(별도제출).  끝.

								시설보수과장
주무관							이동섭				주무관					김종성					시설보수과장					07/31 신동헌
협조자
시행			시설보수과-6725										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8374							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	부분공개(5)