투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	변경계약(1차) 의뢰 [2017년 도로기전시설물 유지보수공사(연간)]

1. 우리과에서 추진하는「‘17년 도로기전시설물 유지보수공사」와 관련, 아래와 같이 변경계약(1차)을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2017년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2017. 3. 3. ~ 2017. 12. 31.

다. 계약업체 : ㈜류광전력 대표 이병순

라. 공사금액 : 금245,187,400원

마. 설계변경 내역                                    (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감
계약금액	245,187,400	295,930,000	50,742,600

바. 설계변경사유

1) 제1차~제4차 작업에 따른 계약수량대비 시공물량 증․감 발생

2) 예산추가배정(비상벨) 및 신규 공종 추가에 따른 물량변경 발생

사. 예산과목 : 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비

붙임 1. 설계변경(1차) 방침서 1부.

2. 설계변경(1차) 내역서 1부.

3. 합의각서, 계약금액 검증확인서 각 1부.  끝

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	안종필		기전과장	최태용		북부도로사업소장	07/31 신응수
협조자	관리단속과장	代이강용
시행	기전과-7424	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913(번동,북부도로사업소)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5470	/전송	02-945-5074	/	ajp66@seoul.go.kr	/	부분공개(6)