문서번호	행정운영과-8421
결재일자	2017.8.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		유정상	08/01 정진일
협조

청사 앞마당 출입구

목재계단 교체공사 정산보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 8.

상수도사업본부

(행정운영과)

청사 앞마당 출입구

목재계단 교체공사 정산보고

「청사 앞마당 출입구 목재계단 교체공사」관련 스크류파일박기 공정에서 물량이 변경되어 이에 따른 변경사항에 대하여 준공전에 설계변경 하여 정산 처리코자 함

□ 계약 현황

○ 공 사 명 : 청사 앞마당 출입구 목재계단 교체공사

○ 계약업체 : ********************

○ 공사기간 : 2017. 7. 25. ~ 8. 3

○ 계약금액 : ***********

○ 공사규모

- 청사 앞마당 출입구 목재계단 교체 : 1.5W × 2.1H × 1set

- 스크류파일박기 : L1800 × Ø76 × 3.65T × 6개

□ 보고 내용 : **************

○ 설계 변경 사유

- 당초 목재계단 기초로 스크류파일 6개를 설치하려 하였으나,

- 기존 목재계단 하부에 목재를 받쳐주는 콘크리트 기초가 있어 이를 활용하여 계단틀을 설치함으로써 스크류파일 6개 및 관련장비 미사용에 따른 정산

○ 변경 금액

구 분		계 약 금 액		감액	비 고
		당 초	변 경
총 공 사 비		***********	***********	***********
도급비	공급가액	***********	***********	***********
	부가세	*********	*********	*********
	계	***********	***********	***********

○ 물량 변경 내역

공종	규 격	단위	수 량		증감	사유
			당초	변경
스크류파일박기	L1800xØ76x 3.65T	개	6	0	감 6	미설치
장비(굴삭기)		대	1	0	감 1	파일 미설치에 따라 장비 미사용

□ 행정사항

○ 상기와 같이 공사시행 중 발생한 시공물량 변동조정에 대해 설계

변경을 시행하고, 변경계약 후 준공 처리

첨부 : 설계변경내역서 1부.