문서번호	건축부-13310
결재일자	2017.8.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	건축총괄과장	건축부장
김찬유	박범규	08/01 김진용
협 조

『홍릉바이오.의료 R/D 앵커조성사업(1단계)』

계약변경(2차 및 총차) 검토 보고

2017. 8.

도시기반시설본부

(건 축 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

『홍릉바이오.의료 R/D 앵커조성사업(1단계)』

계약변경(2차 및 총차) 검토보고

「홍릉바이오.의료 R/D 앵커조성사업(1단계)」와 관련 2차 공사 설계변경(가설사무실 설치 제외등)에 따른 계약변경(2차 및 총차) 요청사항에 대해 검토 보고드림

1		공사개요

공 사 명 : 홍릉바이오.의료 R/D 앵커조성사업(1단계)

위    치 : 동대문구 회기로 117-3

규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 3,851.65㎡

용    도 : 연구시설

공사종별 : 리모델링

공사기간 : 2017. 2. 13 ~ 2017. 8. 12(총차)

공 사 비 : 2,815,925,000원(총차)

1,425,968,000원(2차)

시 공 사 : 유호산업개발(주), ㈜새잎새

감 리 자 : ㈜한국종합건축사사무소

현공정률 : 95%(옥상공사, 유리공사등)

2		추진경위

‘17. 2. 13  : 공사착공(1단계)

‘17. 2. 17  : 건설사업관리용역 착수

‘17. 8. 01  : 계약변경(2차 및 총차) 요청(건설사업관리단 → 건축부)

3		계약변경(2차 및 총차) 검토

관련근거 : 한종홍릉제2017-219(2017. 8. 1)호(2차 및 총차 계약변경)

설계변경 공사금액 증·감 현황(2차, 총차)                      (단위 : 원)

구 분	설계변경 공사금액			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 감
총 차	2,815,925,000	2,754,617,000	감 61,308,000
2 차	1,425,968,000	1,364,660,000	감 61,308,000

공사기간 : 변동없음

구 분	공 사 기 간			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 감
총 차	‘17.02.13~‘17.08.12	‘17.02.13~‘17.08.12	해당없음
2 차	‘17.07.13~‘17.08.12	‘17.07.13~‘17.08.12	해당없음

4		건설사업관리용역업체 검토의견

2차 공사 설계변경(가설사무소 설치 제외 등)을 내역 반영한 2차 및 총차 계약변경은 적정하다고 판단됨.

5		처리의견

건설사업관리용역업체의 검토의견과 같이 2차 공사 설계변경(가설사무소 설치 제외 등)반영을 위한 계약변경(2차 및 총차) 추진

6		향후 추진계획

2017. 8. : 계약변경(2차 및 총차)계약

2017. 8. : 공사준공

붙임 : 1. 공사계약 변경(2차 및 총차) 요청(한국종합건축사사무소) 1부.

2. 2차 및 총차 변경내역서 각 1부.

3. 2차 및 총차 예정공정표 각 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.