문서번호	자전거정책과-8663
결재일자	2017.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자전거시설팀장	자전거정책과장
김영수		정원영	08/01 김성영
협조

『신정중앙로등 9개노선 자전거도로 구축 용역』

용역 준공기한 연기보고

2017. 8.

자전거정책과

『신정중앙로등 9개노선 자전거도로 구축 관련』

용역 준공기한 연기보고

『신정중앙로등 9개노선 자전거도로 구축용역』과 관련하여 일부구간 노선변경 및 신규노선 구축으로 인한 과업변경, 교통안전시설심의(경찰청)등 내실있는 용역수행을 위하여 과업기간을 연장코자 함

Ⅰ		용역개요 및 추진경과

□ 용역개요

○ 용  역  명 : 신정중앙로등 9개노선 자전거도로 구축 및 실시설계용역

○ 계  약  자 : ㈜서우티이씨 대 표 ; 강 대 신

○ 계약금액 : 금 92,679,000원(금구천이백육십칠만구천원)

○ 계약년월일 : 2017. 3. 13.

○ 착수년월일 : 2017. 3. 14.

○ 준공예정일 : 2017. 8. 10.

○ 과업내용

- 주변개발여건을 포함한 관련계획 조사 및 검토

- 교통자료 수집, 교통현황조사 및 수요예측.분석(자전거이용실태포함)

- 과업대상지역의 교통문제 대응방안 및 가로망체계 소통상 개선방안

- 차로축소등 교통체계 개선방안 및 주변도로에 대한 접근방안 수립

- 서울지방경찰청의 교통안전시설심의 사항

- 대상노선 실시설계 및 공사비 산출

□ 추진경과

○ 용역계약 및 착수                          : ‘17. 3월

○ 자치구 및 관련부서 의견청취 및 업무협의   : ‘17. 4월~6월

○ 주민설명회 및 관계기관 의견 청위       : ‘17. 7월

○ 신규노선 구축 및 관련부서(경찰청등) 협의 : ‘17. 8월~9월

○ 용역최종보고회                         : ‘17. 9월

○ 용역성과 검토 및 준공                  : ‘17.10월

Ⅱ		용역 과업기간 연장

□ 연장사유

○ 자전거도로 구축노선중 일부노선의 주민반대로 신규노선 발굴에 따른 용역수행 기간 필요

○ 경찰청『교통안전시설 심의위원회(규제심의)』심의기간 필요

○ 도심내 자전거도로망 확충을 위해 용역 준공기한을 연장하여 용역수행에 만전을 기하고자 함.

□ 연장방안

○ 과업기간 연장 : 150일→220일(70일)

- 당 초 : ’17.3.14~’17. 8.10

- 변 경 : ’17.3.14~’17.10.19(추석연휴‘17.9.30~’17.10.09, 10일포함)

○ 귀책사유 : 우리시(지체상금은 미부과)

○ 계약금액 : 변경없음

Ⅲ		향후 추진일정

○ 준공기한 연기의뢰(자전거정책과→재무과)

○ 향후 추진계획

- 신규노선 구축 및 관련 부서협의 등     : 2017. 8월

- 교통안전시설심의(경찰청) 및 실시설계  : 2017. 8월~9월

- 용역최종 보고회                          : 2017. 9월

- 용역성과 검토 및 준공                : 2017. 10월. 끝.