문서번호	시설보수과-2842
결재일자	2017.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김재봉	김일운	08/01 정흥순
협 조

-난지수계 차집관로 내부조사 용역-

설계변경(정산) 시행계획 보고

2017. 7.

난지물재생센터

(시설보수과)

- 난지수계 차집관로 내부조사 용역-

실계변경(정산) 시행계획 보고

□ 우리 센터에서 시행중인 난지수계 차집관로 내부조사 용역  에 대한 설계변경(정산) 사유가 발생하여 이에 대한 시행계획 보고임.

□ 용역개요

1. 용 역 명 :  난지수계 차집관로 내부조사 용역

2. 용역범위

○ 용역위치 : 홍제천 및 불광천 일대

○ 주요용역내용 : 차집관로(사각) 내부조사 L=24km

(홍제천 : 9.4km, 불광천 : 16.4km)

○ 용 역 사  : 태일환경관리㈜

3. 계약현황                                              (단위 : 천원)

구 분	계약금액	계약기간	비 고
계약현황	176,550	‘17. 04. 19 ~ ’17. 08. 19

4. 용역구간 위치

□ 설계변경(정산) 시행계획

1. CCTV 조사

구 분	단 위	당 초	변 경	증·(감)	비고
하수차집관내 CCTV조사 (수심 : 30cm 이상)	km	17.18	10.93	-6.25
하수차집관내 CCTV조사 (수심 : 30cm 이하)	km	6.82	10.93	4.11

- 변경사유 : 내부관로 수심 상태에 따른 조사구간의 CCTV 조사연장 변경

( 총연장 L=24km , 촬영구간 L=21.86km , 미촬영구간 L=2.14km

미촬영구간 => 단차 및 맨홀개패불가 L=1.5km , 맨홀 공제 L=0.64km )

2. 용역비 변경 : 총 37,820천원 감액

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감
○ 총 계	176,550	138,730	(감)	-37,820
하수차집관내 CCTV조사 (수심 : 30cm 이상)	135,845	86,396	(감)	-49,449
하수차집관내 CCTV조사 (수심 : 30cm 이차)	24,655	39,722	(증)	15,067
소 계	160,500	126,118	(감)	-34,382
부가가치세	16,050	12,612	(감)	-3,438
합 계	176,550	138,730	(감)	-37,820

3. 조치의견

- 용역구간의 수량 정산에 해당되는 사항으로 실제 조사한 결과에 따라 설계변경(정산)코자 함.

붙임 : 난지수계 차집관로 내부조사 용역 설계변경(정산)내역서 1부. 끝.