문서번호	시설보수과-6826
결재일자	2017.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영원		이근봉	08/02 신응수
협조

실정보고사항 검토결과 보고

(월계2,3지하차도 보수공사)

2017. 8

북부도로사업소

시설보수과

실정보고사항 검토결과 보고

(월계2,3지하차도 보수공사)

우리사업소에서 시행하고 있는 『월계2,3지하차도 보수공사』에 대해

감독기관인 시설공단의 실정 보고 사항에 대한 검토 보고 임.

관련근거

❍ 시설관리공단 공사감독2처 – 7671호(2017. 7. 31) 실정 보고서 제출 건

공사현황

❍ 공 사 명 : 월계2,3지하차도 보수공사

❍ 공사기간 : 2017. 04. 19 ~ 2017. 10. 29

❍ 도 급 액 : 423,658,700원

❍  공사개요  :  아스팔트포장 덧씌우기 98a, 콘크리트 바닥보수 100㎡

신축이음보수 315m 등

❍ 도 급 자 : 태원건설㈜ 대표 김성원, 한신호

실정보고 내용

❍ 당초 설계 보수물량 : MMA(t=5cm) 50㎡ , 초속경(t=20cm) 50㎡

❍  아스팔트 절삭 후  실측한 결과 MMA(t=5cm) 18.5㎡, 초속경(t=20cm) 9㎡ 증가

되어 증가된 바닥보수물량을 예산범위 내에서 보수하기 위하여 초속경(t=10cm)

50㎡를 신규공종으로 산출해야함에 따른 공사비가 증가

❍ 개략공사비(바닥콘크리트 보수공) : 증 39,380,000(제잡비 포함)

- 당초 :  87,230,000

- 변경 : 126,610,000

공 종	규 격	단 위	수 량			비 고
			당초	변경	증 감
계		㎡	100	178	증) 78
바닥콘크리트 보수(레코MMA)	야간, T=5cm	㎡	50	68.5	증)18.5
바닥콘크리트 보수(초속경)	야간, T=20cm	㎡	50	59	증) 9
바닥콘크리트 보수(초속경)	야간, T=10cm	㎡	0	50.5	증)50.5	신규 대가

검토결과

시설보수과 – 4519호(2017.5.22.)방침에 미집행 예산(낙찰차액)활용계획 보고시 바닥콘크리트 수량증가에 활용코자 한 사항으로 시설공단에서 보고한 사항과 같이 증가분에 대해 변경 시공토록 하는것이 타당 할 것으로 판단됨.

조치사항

시설공단의 의견과 같이 처리토록하고 추후 설계변경시 공사금액내에서 물량변경 반영 조치

검토결과를 시설관리공단에 통보

붙  임 : 실정보고서 공문 1부.  끝.