상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	재무회계과장
(경유)
제목	변경 계약 의뢰(청사 앞마당 출입구 목재계단 교체공사)

1. 행정운영과-8466(2017.8.2.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「청사 앞마당 출입구 목재계단 교체공사」에 대하여 아래와 같이 계약 변경을 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 청사 앞마당 출입구 목재계단 교체공사

나. 계 약 자 : **********************

다. 계약기간 : 2017.7.25.~2017.8.3.

라. 변경사유 : 시공물량 감소에 따른 공사비 정산

마. 변경금액

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
계약금액	***********	***********	***********

바. 예산과목 : 일반관리비(기본경비), 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부. 끝.

	행정운영과장
주무관	최영조		행정운영과장	08/02 유정상
협조자
시행	행정운영과-8469	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)3146-1137	/전송	3146-1258	/		/	부분공개(6)