문서번호	시설과-4730
결재일자	2017.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설과장
오영근		강민수	08/03 김재균
협조

『2017년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』  설계변경(1차) 검토보고

2017.08.

중부공원녹지사업소

시설과

2017년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』  설계변경(1차) 검토보고

「2017년 전기설비 유지보수공사(연간단가)」의 2차 작업지시 완료에 따른 작업물량 변경 및 신규 공종 추가로 인한 설계변경 사항 보고 임.

공사개요

공 사 명 : 2017년 공원 전기설비 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : 두성건설㈜  (대표 : 안성병)

공사금액 : 금130,437,680원

계약일자 : 2017.02.28.

착공일자 : 2017.02.28.

준공기한 : 2017.12.31.

설계변경 주요사유

변경근거 : 시설과-4327(2017.7.17.) 작업지시(2차) 완료보고

- 남측순환로 및 중앙계단 LED 등기구 교체 등으로 인한 작업 물량 변경.

- 기타 전기시설물 보수작업으로 인한 신규 공종 추가 등.

설계변경 내용

설계변경 금액                                              (단위 : 원)

구 분		변 경 전	변 경 후	증감	비고
		금 액	금 액
도급비	공 사 원 가	118,579,709	118,579,709	-
	부 가 가 치 세	11,857,971	11,857,971	-
	계	130,437,680	130,437,680	-

※신규 공종 물량이 추가되었으나 계약 물량 변경으로 계약금은 변동 없음.

조치의견

상기 계약금 변동 없이 정산 설계변경(1차) 시행하고자 함.

첨부 : 설계변경 내역서 1부. 끝.