상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공사변경계약체결[청사 앞마당 출입구 목재계단 교체공사]

1. 행정운영과-8469(2017.8.2.)호와 관련입니다.

2. “청사 앞마당 출입구 목재계단 교체공사”건에 대한 변경계약을 아래와 같이 체결코자 합니다.

가. 건    명 : 청사 앞마당 출입구 목재계단 교체공사

나. 계 약 자 : 세기하이테크건설㈜   대표 김형진

다. 계약기간 : 2017.7.25. ~ 2017.8.3.

라. 계약금액 : 금3,408,090원(금삼백사십만팔천구십원)

마. 변경내역 : 계약금액 변경(계약금액 감액)

건 명	당초	변경	비고
	계약금액	계약금액
청사 앞마당 출입구 목재계단 교체공사	5,050,000원	3,408,090원	1,641,910원 감액

바. 변경사유 : 시공물량 감소에 따른 공사비 정산

사. 조치사항 : 변경사항에 따른 관련 서류 검토 후 계약체결

붙임 : 1. 공사변경계약서(초안) 1부.

2. 합의각서 등 각 1부.  끝.

주무관	이정미		재무회계과장	박병식		요금관리부장	08/03 조세연
협조자
시행	재무회계과-10671	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51(합동)	/
전화	02-3146-1242	/전송	02-3146-1209	/	mi2504@seoul.go.kr	/	부분공개(5)