투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철9호선 3단게 시스템분야 책임감리원
(경유)
제목	9호선 3단계 1,2구간 전차선공사 물가변동으로 인한 계약금액 조정결과 통보

1. 서지9-3 시감 제17-212호(2017.04.07.) 및 서지9-3 시감 제17-213호(2017.04.07.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 9호선 3단계 1, 2구간 전차선공사에 대한 조달청의 물가변동으로 인한 계약금액 조정(2회) 결과를 다음과 같이 통보합니다.

가. 공사명 : 서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 1,2구간 전차선공사

나. 계약자 : 1구간 - (합)동양통신 외 1개사,

2구간 - 현창전기(주) 외 1개사

다. 물가변동으로 인한 계약금액 조정결과(2회)

○ 1구간 전차선공사 조정결과

구 분	조정요청	검토결과	비 고
계약체결일(직전조정일)	2015.08.18. (2016..09.01)	2015.08.18. (2016..09.01)
조정기준일(비교시점)	2017.01.31	2017.01.31
물가변동 경과기간	151일	151일
물가변동 대상 계약금액	4,100,293,136원	4,100,293,136원
물가변동 적용 제외금액	1,772,025,413원	1,772,025,413원
물가변동 조정율	3.76%	3.76%
물가변동 조정검토 금액	87,539,000원	87,539,000원

○ 2구간 전차선공사 조정결과

구 분	조정요청	검토결과	비 고
계약체결일(직전조정일)	2015.08.20. (2016..09.01)	2015.08.20. (2016..09.01)
조정기준일(비교시점)	2017.01.31	2017.01.31
물가변동 경과기간	151일	151일
물가변동 대상 계약금액	4,681,688,500원	4,681,688,500원
물가변동 적용 제외금액	1,827,068,077원	1,827,068,077원
물가변동 조정율	3.82%	3.82%
물가변동 조정검토 금액	109,046,000원	109,046,000원

라. 물가변동 조정금액을 반영한 계약변경 : 3차분 계약 이후.

붙임 1,2구간 전차선공사 조달청 조정검토 의견서 각 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	문학준		송변전과장	代조대근		도시철도설비부장	08/03 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-9533	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 중구 세종대로 125 (태평로1가)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3702-1265	/전송	02-3702-1244	/	namoon@seoul.go.kr	/	대시민공개