투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	두산중공업(주) 서울숲 공동주택 신축공사현장
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 준공기한 변경 승인

1. 두산중 EPC)서울숲17-138호(2017.07.28.)와 관련입니다.

2. 「서울숲 공동주택 신축공사 관련 교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사 공사기간 연장요청건」에 대해 아래와 같이 승인하오니,

3. 「교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항」 및 「노면표시 시방서」 규정에 따라 공사를 시행하여 주시고 공사완료 후 T-GIS시스템 입력 및 준공확인을 요청하시기 바랍니다.

가. 승인기간 연장

공 사 명		교통안전시설물 설치공사(서울숲 공동주택 신축) 노면표시(제거/도색)	비고
공사기간	당 초	2016.09.08..~ 2016.12.31.	공사관리번호 2016-0207-074
	변 경	2016.09.08.~ 2017.08.30.
연기사유		뚝도아리수정수센터 삼거리 우회전 허용 변경규제로 인한 공사기간 연장

끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	민병훈		도로보수과장	08/04 이상호
협조자
시행	도로보수과-3913	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동)	/
전화	02-2210-1538	/전송	02-2210-1549	/		/	부분공개(5)