＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	지연배상금 부과(청사 시설물 개보수 공사)

우리사업소가 발주한『청사 시설물 개보수 공사』의 계약 상대자가 준공기한내 준공완료치 않아 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령 제90조 1항 및 동법 시행규칙 제75조에 의거 지연배상금을 아래와 같이 부과하고자 합니다.

가. 계약내역

1) 계 약 자 : 제이에스메이드 최재성

서울시 금천구 시흥대로 97길 32동139호(시흥산업재유통센타)                     2) 계약금액 : 금11,088,000원(금일천일백팔만팔천원)

3) 계약일자 : 2017. 7. 19

4) 준공기한 : 2017. 7. 28

5) 준공검사일 : 2017. 8. 03

나. 지연배상금 내역

1) 지연일수 : 6일 〔 2017.7.29. ~ 8.3〕

2) 지연배상금율 : 0.5/1,000

3) 지연배상금 : 11,088,000×0.0005×6일 = 33,260원

다. 처리방법 : 지연배상금 고지서 발급후 은행 납부. 끝

주무관	정유정		행정관리팀장	김종진		행정지원과장	김인웅		강남수도사업소장	08/04 代김인웅
협조자
시행	행정지원과-17783	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02)3146-4720	/전송	02)3146-4953	/		/	부분공개(6)