투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 건설정보관리시스템 유지관리 및 기능개선 용역 월간보고(7월)

1. ’17년 건설정보시스템 유지관리 및 기능개선 계획(본부장방침 건설총괄부-26474, ’16.12.06)호와 관련입니다.

2.「2017년 건설정보관리시스템 유지관리 및 기능개선」용역을 추진 중인바, 2017년 7월 실적을 보고합니다.

가. 사업 개요

1) 계약건명 : 2017년 건설정보관리시스템 유지관리 및 기능개선 용역

2) 계약기간 : 2017. 2. 14 ~ 2017. 12. 31

3) 계약금액 : *********

4) 계약업체 : **********

나. 월간보고

1) 보고내용 : 2017년 7월 실적

2) 공 정 율 : 계획 52.34% / 실적 51.30%

3) 주요사항

구분	추진사항
2017. 7월 추진실적	o 발주처 공사감독관 행정모드에서 사업관리 가능토록 구성(완료) - 행정모드 사업관리 메뉴 재구성을 위한 서브메뉴 기능개발 ․ 프로그램 개발 완료, 테스트 후 서버반영 완료 o 건설알림이 “본부장에게 바란다” 응답소 연계기능 구현(완료) - 응답소 연계 기능 구현 완료, 테스트 후 서버반영 완료 o 자료관리 기능 개선 및 건설알림이에 주민설명회 공개 추가(완료) - 주민설명자료, 수방대책자료 등 자료구분 분류코드 재정의 후 프로그램 개발 완료, 테스트 후 서버 반영 - 자료관리 메뉴에 공개여부 기능 추가 개발 완료, 테스트 후 서버 반영 - 건설알림이에 주민설명자료 자료 공개 o 건설알림이 영문버전 웹사이트 구축 및 연계(완료) - 서울시 홈페이지에 건설알림이 영문 웹사이트 구축 후 건설알림이 연계 링크 추가 반영 o 퇴출근로자 이력관리 기능 구현(완료) - 안전수칙위반자 및 사고 유발자 정보 등 퇴출근로자 이력관리 기능 개발 완료, 테스트 후 서버반영 완료 o 건설정보관리시스템(One-PMIS)내 ActiveX(파일업로드/다운로드) 제거를 위한 기능개선(계속) - 파일다운로드/업로드 기능을 사용하는 사업모드 전체 개발 완료 o 키스콘 6종의 자료처리 방식을 대금e바로시스템 정보연계로 개선(계속) - 자료수신을 위한 연계 스키마 정의 및 확정 - 자료수신을 위한 연계요청, One-PMIS내 축적자료 제공 - 연계대상 : 6종(공사대장, 업체대장, 공사실적, 신기술정보, 업종정보, 수주업체리스트) o 건설 중요기록물(도면 등) DB전산화에 따른 연계(계속) - 관련 자료 분석 o 서울시 내부시스템 정보연계 및 표출(계속) - 디지털시민시장실 송신자료 뷰테이블 정보 분석 - 빅데이터 분석시스템 송신자료(뷰테이블) 추가정보 정의 및 기타 요구사항 협의 o 사토 및 폐기물 스마트 관리시스템과의 정보연계(계속) - 정보시스템 보안성 검토중 - 연계시스템 업체와 연계방식 등 협의 o 기능보완 개발 (기능보완 및 오류 수정) - 통합검색 검색조건 변경(시공사, 건설사업관리자) - 건설근로자공제회의 전자인력관리제 정보 연계 오류 수정 - 사용자 지원 콜센터 운영, 타시스템 연계지원, 서버 정기점검 등
2017. 8월 추진계획	o 건설정보관리시스템(One-PMIS)내 ActiveX(파일업로드/다운로드) 제거를 위한 기능개선(계속) o 사토 및 폐기물 스마트 관리시스템과의 정보연계(계속) o 키스콘 6종의 자료처리 방식을 대금e바로시스템 정보연계로 개선(계속) o 건설 중요기록물(도면 등) DB전산화에 따른 연계(계속) o 서울시 내부시스템 정보연계 및 표출(계속) o 사용자 매뉴얼 및 교육자료 관리절차 개선(계속) o 사용자별 동영상 강의자료 구축 및 정보연계(계속) o 건설알림이 웹접근성 심사(계속) o 기능보완 개발 (기능보완 및 오류 수정)

붙임	1. 월별공정보고서	1부.

2. 2017 용역사업 일정표	1부.

3. 유지보수 작업지시 관리대장	1부.

4. 서버정기점검보고서	1부.

5. 보안점검결과서	1부.

6. 출근부	1부.	끝.

주무관	김주형		건설정보관리과장	정해민		건설총괄부장	08/04 代안순봉
협조자
시행	건설총괄부-18134	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 11층 건설총괄부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2387	/전송	3708-2327	/	mistletoe@seoul.go.kr	/	부분공개(5)