투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철9호선 3단계 시스템분야 책임감리원
(경유)
제목	9호선 3단계 전기사용전검사 대비 철저

1. 도시철도설비부-9469(2017.8.2.)호 및 도시철도설비부-9470 (2017.8.2.)호와 관련입니다.

2. 서울지하철9호선 연장건설 3단계 구간의 전력공급을 위하여 전기사용전검사 및 전기수전 계획을 수립·통보하오니 검사 및 수전업무에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 시설물 관리책임자 지정 등 안전대책을 수립하여 전력수전 후,  사고예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

<검사일정>

분 야 별		사용전검사 시기	검 사 대 상 설 비	비 고
변전소	931, 938	‘17.08.21.~08.29.	수전선로(2), 변전설비(2)
	935	‘17.09.25.~09.29	수전선로(1), 변전설비(1)
6.6~22.9kV연락송배전		‘17.08.21.~10.23.	22.9kV송전(3) 6.6kV배전(30)	케이블
전차선 설비		‘17.10.20.~10.30.	전차선 정․부급전 케이블 등	3개소
정거장 전기실		‘17.09.15.~10.23.	정거장 전기설비(신호,통신 전원포함)	8개소
전기 부하설비		‘17.10.20.~11.30.	정거장 역사내 전기설비	8개소

※ 정거장 전기설비 및 전차선에 대하여는‘17년 9월~10월 중 전기설비 완성 후 부분검사 추가 시행

. 정거장 부분검사 각 2회(전기실 8개소), 전차선 설비 등

. 6.6kV 1,2,3호계 연락배전은 전기실 부분검사와 병행 시행

붙임1  전기사용전검사 및 전력수전 계획 보고서 1부.

2  전기사용전검사 신청 공문 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이재복		송변전과장	김영수		도시철도설비부장	08/04 구자훈
협조자	주무관	이재영
시행	도시철도설비부-9554	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 8층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7272	/전송	772-7308	/		/	대시민공개