문서번호	설비부-13450
결재일자	2017.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	08/07 代유병기

- 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 통신공사 -

통합배선반 정산 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 08.

도시기반시설본부

[설 비 부]

- 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 통신공사 -

통합배선반 정산 검토보고

우리본부에서 추진중인「서울바이오허브 조성 본관동 리모델링 통신공사」와 관련 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재(통합배선반) 설계변경 사항에 대하여 아래와 같이 검토 보고 드림

1. 관련 근거

○ 한종홍릉 제2017-231(2017.08.04.)호

- 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링공사_ 통합배선반 정산보고

2. 개요

○ 건    명: 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링공사_통합배선반

○ 계약기간: 2017.05.12. ~ 2017.08.12.

○ 계약금액: 58,981,000원

○ 계약업체: 링크정보시스템(주) 대표 김영호

○ 감 리 사:  ㈜한국종합건축사사무소

3. 변경 현황

○ 변경사유: 미사용 보험료 정산

○ 보험료 등 경비 정산

구 분	당 초	변 경	증, 감	비 고
건강보험료	173,641	0	감) 173,641	미사용 보험료 정산
노인장기요양보험료	11,373	0	감) 11,373
연금보험료	254,334	0	감) 254,334
일반관리비, 이윤 등	7,917,168	7,711,516	감) 206,652

○ 계약금액 변경 내용                                       (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
공급가액	53,619,091	53,031,819	-587,272
부가가치세	5,361,901	5,303,181	-58,728
도급금액	58,981,000	58,335,000	-646,000

4. 검토자 의견

○ 본 공사의 건설사업관리단의 계약변경 기술검토의견 사항을 검토한 결과 검토의견과 같이 미사용 보험료를 정산함이 적정한 것으로 판단되어 계약변경을 시행하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 서울바이오허브 조성 본관동 리모델링공사_ 통합배선반 정산보고. 끝.